문서번호	청소행정과-9451
결재일자	2023. 3. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		시설장비팀장		청소행정과장		스마트포용도시국장
송영경		방기환		정헌욱		03/23
						어용경
협조
	재무과장		김영규
	계약팀장		황미란
	자원순환팀장		하은자

관급자재(스티로폼 감용기) 변경 검토 보고(자원회수센터 시설 현대화 사업)

『자원회수센터 시설 현대화 사업』

관급자재(스티로폼 감용기) 변경 검토 보고

2023. 3.

(청소행정과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [√] 안전 [√] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	서울시	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
구민의견 수렴		●	방법	:	설문조사 [ ] 만족도 조사 [ ] 찬반투표 [ ] 기타 [√]
		●	시기	:	시행 전 [ ] 시행 중 [ ] 시행 후 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목:
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

『자원회수센터 시설 현대화 사업』

관급자재(스티로폼 감용기) 변경 검토 보고

『자원회수센터 시설 현대화 사업』추진 중 ************************* 관급자재 변경 검토를 보고 하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

▢ 자원회수센터 시설 현대화 추진계획[구청장방침 제152호(’22.03.07.)

▢ 자원회수센터 시설 현대화 사업 공사 발주계획[부구청장방침 제568호(’22.11.09.)

▢ 성동구자원회수센터 시설 현대화 사업 특정기술 제품 요청서(성동구 도시관리공단 환경개선팀-1097, ’23.03.16.)

Ⅱ		사 업 개 요

▢ 사 업 명: 자원회수센터 시설 현대화 사업

▢ 사업위치: 성동구 천호대로78길 58(송정동 78-1)

▢ 사업기간: 2022. 3. ~ 2023. 8.

▢ 사업내용: 자동선별기계 신설,노후장비 교체 등 시설 현대화

▢ 소요예산: 2,860백만원(국:시:구=30:35:35)

- 국비 858백만원, 시비 1,001백만원, 구비 1,001백만원

Ⅲ		추 진 경 과

▢ 2021. 10.	2022년 공공선별시설 현대화 사업 예산지원 사전 검토요청서 등 제출

▢ 2021. 12.	2021년 특별조정교부금 확보

▢ 2022.  3.	자원회수센터 시설 현대화 추진계획 수립

▢ 2022. 10.	설계 용역 완수

▢ 2022. 12.	1차 공사, 관급계약체결 및 ′21년 사고이월 예산 선금 지급(449백만 원)

▢ 2023.  1.	착수회의 및 공정회의 진행(공정 간 장비규격 검토 및 협의)

▢ 2023.  2.	전기공사 관급자재(배전반) 계약

Ⅳ		스티로폼 감용기 설계 현황

▢ 스티로폼 감용기 기능

- 스티로폼 압축설비는 분리수거 되어 반입된 스티로폼을 압축기에 공급하는 스티로폼 투입컨베이어, 공급된 스티로폼을 일정한 입도로 파쇄 처리하는 파쇄기, 스티로폼을 일정한 형상으로 압축하는 압축기로 구성

▢ 스티로폼 감용기 설계 제원

구 분	대 수	형 식	처리용량	히팅방식	전기용량	비 고
**********	**	****	**********	***	****	*******
**********	**	****	*********	***	****	******

Ⅴ		성동구 도시관리공단 요청사항

▢ ******************************************************************************

************************************************************************************************************************

Ⅵ		****************

▢ ***********

업체명	모델명	특허 기술 적용
****	*******	******************************* ***********************************
파쇄 및 이물질 분리기			자동 분리된 테이프

▢ ************************

**	*****	***********
***	** ***********	****
****	**********	**********
***********	***	**********************
****	******	****************
****	*********	*********
****	****	****
******	******	***********
****	***	*********
****	****** *** *** **** *** ****** *** *****	***** ******* ****************** **** *** ********* ************* *****
*********	**	*******
***	********************* ********************* ************* **************************** ************************	********************************************************* ***************************************** ************************************** ************************************************************** ***********************************
***	****************************************** *************************************** *************************************** ************************ **************************	********* ************************* ********************* **************************

Ⅶ		소 요 예 산

▢ 소요예산

구분	설계예산	특정제품	증 감
********	**********	**********	***********

▢ 예산 증액 부분은 타 공정 낙찰 차액 사용

▢ 예산과목

- 청소행정과, 청소관리(폐기물/환경보호), 자원 재활용 및 폐기물 처리, 자원회수센터 시설 현대화, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

Ⅷ		보고자 검토 의견

******************************************************************

********************************************************************************************************************************

*************************************************************************************

***********************************************

Ⅸ		행 정 사 항

▢ ’23. 3.        ***********************)

▢ ’23. 4.        스티로폼 감용기 발주 및 계약

▢ ’23. 5.~7.    스티로폼 감용기 제작 및 설치

▢ ’23. 8.        스티로폼 감용기 시운전 및 인수

붙임  1. 스티로폼 감용기 견적서 및 내역서 1부.

2. **************

3. 납품실적증명서 1부.

4. 시방서 1부  끝.

5. 제원 및 장단점 비교표 1부.

6. 설치사진 및 도면 1부.  끝.