"꿈이 모이는 도시, 미래를 그리는 강남"

등록번호	공원녹지과-6827		주무관	공원조성팀장		공원녹지과장		도시환경국장		부구청장
			조성현	방일길		박기선		진조평		전결 03/23
등록일자	2023.03.23
결재일자	2023. 3. 23.									정헌재
공개구분	대시민공개
			협조자		재무과장		임경수
					계약팀장		김상은
					지구단위팀장		김기숙		행정국장		정찬식

수서역 6번 출구 만남의 광장 조성사업 추진계획

ㅓㄴ

2023. 3.

	강 남 구
(		공원녹지과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 • 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등
공직선거법 검토	이 사업(업무) 추진과 관련하여 공직선거법 위반사항 등을 검토하였습니까?
	• 검토사항 예시 : 기부행위, 홍보물 발행, 행사 개최(후원), 업적 홍보, 선거 관여 등 • 검토결과 : 관련 법 등에 저촉이 없는 것으로 검토
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 만남과 휴식이 있는 수서역 광장 조성사업 추진계획(공원녹지과-26241호, 2022.11.01.)
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 근거 : 서울특별시 주차계획과 2023년도 본예산 확보 (1,500백만원)
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 수서역을 이용하는 강남구민, 서울시민 및 서울방문객 등 다수
(예상) 공공갈등 등급진단	이 업무(사업)과 관련하여 아래 민원발생 관련사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 다수의 이해관계인 존재여부 ( ) ⑦ 법률 등 제도적 변경 필요여부 ( ) ② 강남구와 갈등발생(예정포함) ( ) ⑧ 갈등전개 과정에서 집단화 예상 ( ) ③ 언론매체 보도 여부 ( ) ⑨ 갈등의 표출형태(민원 등) ( ) ④ 보도된 횟수 ( ) ⑩ 해결방안(대책) 가능여부 ( ) ⑤ 보도된 매체 수 ( ) ⑪ 별도의 예산소요 여부 ( ) ⑥ 갈등해결 예상 소요기간 ( ) ⑫ 2개 이상 관련기관 협조여부 ( )
	• 해당없음
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ③ 미래행정 수요예측 및 시장조사 ----------------- ( ) ④ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑤ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 해당없음
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

수서역 6번 출구 만남의 광장 조성사업 추진계획

서울(강남) 주요 관문인 수서역 6번 출구 주변에 위치한 공영주차장을 만남과 휴식이 있는 광장으로 조성하여 이용 편익 증진 및 도심 경관 개선에 기여코자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

□ 대상지는 서울의 주요 관문이자 서울둘레길 주 입구로서 유동인구가 많은데 비해 보행자를 위한 쉼터 및 편의시설이 매우 부족

□ 수서역 6번 출구 주변 대부분이 개발제한구역이면서 사유지로 그동안 휴게 및 편의시설 조성을 위한 가용지 확보 어려움

□ 서울시(주차계획과)와 적극적인 협업을 통해 사업대상지를 발굴하여 도심 경관을 개선하고 만남과 휴식이 있는 광장을 조성코자 함

Ⅱ		추 진 경 위

□ 2022.11.01.: 사업대상지 발굴 및 추진계획 수립 (區공원녹지과)

□ 2022.11.22.: 市재산관리관 의견 조회 (區교통행정과 → 市주차계획과)

- 수서역(남)공영주차장 부지를 활용한‘만남과 휴식이 있는 광장’조성 제안

□ 2022.12.12.: 市주차계획과 의견 회신 (市주차계획과 → 區교통행정과)

- 검토결과: 공영주차장 용도 유지 (부정적 의견)

□ 2022.12.15.: 시의회 예결위 예산 편성 (15억원, 市주차계획과)

□ 2023.02.02.: 市주차계획과 재협의 (區공원녹지과·市주차계획과)

- 협의결과: 조성 추진 (적극 협조)

· 사업 시행 및 예산 집행 → 강남구 공원녹지과

Ⅲ		사 업 개 요

□ 위    치: 수서동 727, 수서역(남) 공영주차장 부지

※ 수서택지 지구단위계획구역 내 도시계획시설(주차장)

□ 규    모: 2,963.5㎡ (시유지 - 서울시 주차계획과)

□ 내    용: 수서역 주변 이용 시민을 위한 만남의 광장 조성

※ 도시계획시설 (변경)결정: 주차장 → 광장

□ 사 업 비: 1,500백만원 (시비)

□ 예산과목: 서울시 주차계획과, 주차장 확충 및 관리, 주차장 건설 및 운영관리, 공영주차장 관리위탁, 시설비

□ 위치도 및 현황사진

Ⅲ		세부 추진계획

□ 추진 절차

〈 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ 도 시 계 획 시 설 ( 변 경 ) 결 정 용 역 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ 〉
기본 구상 및 계획(안) 작성	‣	주민의견청취 및 유관부서 협의	‣	區 도시·건축 공동위원회 자문	‣	지구단위계획 입안	‣	市 도시 ․ 건축 공동위원회 심의	‣	지구단위계획 결정 및 고시
4 ~ 5월		6 ~ 7월		7 ~ 8월		8월		8 ~ 9월		9월
〈 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ 조경 실시설계용역 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ 〉						〈 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ 조성 공사 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ 〉
광장 계획(안) 작성	‣	주민설명회 개최	‣	市 건설기술심의 및 계약심사	‣	실시계획 작성 및 고시	‣	공사발주 및 착공	‣	공사 준공 및 완료 고시
7 ~ 8월		8월		8 ~ 9월		10월		10월		12월

□ 도시계획시설(변경)결정 및 조경설계 용역

ㅇ 용역기간: 2023. 4. ~ 9. (6개월)

ㅇ 용 역 비: 90백만원 (도시설계 40백만원, 조경설계 50백만원)

ㅇ 과업내용

- 도시계획시설(변경)결정

․ 현황조사 및 여건분석

․ 도시여건변화 등을 고려한 기본 구상

․ 부문별 지구단위계획 변경

․ 시행 및 집행계획

․ 교통성·경관성·환경성 검토

․ 도시관리계획 결정 변경에 필요한 심의자료, 도서작성 및 행정절차 수행 등

- 광장 조성을 위한 조경 실시설계

․ 대상지 조사 및 분석

․ 조경식재 및 시설물 계획

․ 야간 조명계획 및 시설감시 계획

․ B/F인증절차 이행을 위한 자료 작성

․ 건설기술심의, 계약심사 행정절차 수행

․ 보고서 및 성과품 작성 등

ㅇ 계약방법: 제한경쟁입찰

□ 광장 조성공사

ㅇ 공사기간: 2023. 10. ~ 12. (3개월)

ㅇ 공 사 비: 1,410백만원

ㅇ 계약방법: 제한경쟁입찰

Ⅳ		향 후 계 획

□ 2023.03.24.   : 市예산재배정 및 용역타당성심사 요청

□ 2023.04. ~ 09.: 도시계획시설(변경)결정 및 조경설계 용역

□ 2023.10. ~ 12.: 조성공사 시행

Ⅴ		행 정 사 항

□ 도시계획과: 도시관리계획(도시계획시설: 광장) 변경 결정 절차 이행.  끝.