문서번호	보행자전거과-4268
결재일자	2023. 3. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	자전거도로팀장	보행자전거과장
이하영	代이상근	03/23
		이선희

자전거사고 다발지역 개선 관련 기술용역 추진계획

『자전거사고 다발지역 개선』관련 기술용역 추진계획

2023.  3.

도 시 교 통 실

(보행자전거과)

『자전거사고 다발지역 개선』관련

기술용역 추진계획

2023년 자전거도로 안전시설 확충계획에 따른 자전거사고 다발지역 개선을 위한 기술용역을 추진하고자 함

□ 추진근거

○ 서울특별시 자전거 이용 활성화에 관한 조례 제3조(시장등의 책무)

○ 2023년 자전거도로 안전시설 확충사업 추진계획(보행자전거과-1345, 23.1.31)

○ 자전거사고 다발지역 개선계획(보행자전거과-3527, 23.3.10)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 자전거도로 안전개선 및 안전시설 설계용역

○ 용 역 비 : 59,290천원

○ 용역위치 : 자전거사고 다발지점 37개소

○ 용역기간 : ’23. 4. ~ 7. (착수일로부터 3개월)

○ 용역내용

- 자전거 사고유형, 자전거도로 문제점 조사․분석

- 자전거도로 안전시설 확충 및 안전개선 방안 제시

- 설계도서(현황 및 문제점도, 개선안도) 작성

○ 예산과목

- 도시교통실 보행자전거과, 보행환경 개선 및 자전거이용활성화, 자전거 이용시설 확충 및 관리, 자전거도로 안전시설 확충, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 용역 시행계획

○ 입찰방법 : 전자공개 수의계약

- 추정가격 1억원 이하 용역

‣ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부) 제5장 수의계약 운영요령

○ 입찰자격 : 다음 조건을 모두 충족하는 자

-「엔지니어링산업진흥법」 제21조 및 같은법 시행령 제3조에 의거 건설부문 중 2개 전문분야(도로 및 공항, 교통)의 엔지니어링 사업자 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조에 의거 건설부문 중 2개 기술범위(도로 및 공항, 교통)의 기술사 사무소를 개설 등록한 업체로서

- 현재 주된 사무소가 서울시에 소재한 업체(※공동도급은 2개 업체까지만 허용)

□ 추진경위 및 향후일정

○ 자전거사고 다발지역 개선계획                         : ’23. 3. 10

○ 기술용역 타당성 심사 요청(기술심사담당관)            : ’23. 3.

○ 용역발주                                             : ’23. 3.

○ 용역계약 및 착수                                     : ’23. 4.

○ 용역준공                                             : ’23. 7.

붙임  1. 자전거사고 다발지역 개선계획 1부

2. 설계내역서 1부

3. 과업내용서(안) 1부.  끝.