문서번호	도로보수과-3072
결재일자	2023. 3. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
전휘기		유은중	03/23
			최연우
협조
	주무관		맹우재

「'22/'23 제설작업 용역(장기계속)」

설계변경(2차분) 검토보고

2023. 3.

서부도로사업소

도 로 보 수 과

「'22/'23 제설작업 용역(장기계속)」

설계변경(2차분) 검토보고

우리 사업소에서 시행하는 『'22/'23 제설작업 용역(장기계속)』과 관련하여 '23.03.15.자로 제설대책이 종료됨에 따라 제설작업 용역 설계변경(2차분)을 검토하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		추진근거

□ 제설대책추진(일반운영비) 예산 재배정 알림

○ 도로관리과-780(2023.01.11.)호

□ 2022년 회계연도 기금 사고이월 확정 알림

○ 안전총괄과-908(2023.01.12.)호

Ⅱ		용역개요 및 예산현황

□ 용역개요

○ 용 역 명 : '22/'23 제설작업 용역(장기계속)

○ 용역기간 : '22.11.15. ~ '23.03.31.(127일)

- 1차분 : '22.11.15. ~ '22.12.31.(47일) / 2차분 : '23.01.01. ~ '23.03.31.(80일)

○ 용 역 비 : 금 918,999,000원

- 1차분 : 금 194,000,000원 / 2차분 : 금 724,999,000원

○ 계 약 자 : 두원개발중기(대표 : 권영철)

□ 예산배정현황

(단위 : 천원)

예산과목		예산액	배정일
도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리,제설대책추진,사무관리비	제설작업 용역비, 급량비 및 물품구매	*******	'22.10.07.
안전총괄과, 재해 및 재난예방, 재난 예방 및 복구, 재난예방(재난관리기금 재난계정), 일반운영비, 사무관리비	제설작업 용역비	*******	'22.11.10.

Ⅲ		변경내용 및 조치계획

□ 설계변경 사유

○ 비상근무 발령 및 결빙대비 대기에 따른 공정별 물량 증ㆍ감 정산

- 비상발령 횟수 : 총 22회(보강 14회, 1단계 5회, 2단계 3회, 제설작업 15회)

▸ 1차분 : 총 6회(보강 5회, 1단계 1회, 제설작업 1회)

▸ 2차분 : 총 16회(보강 9회, 1단계 4회, 2단계 3회, 제설작업 14회)

- 2차분 공정별 물량 증ㆍ감 현황

공종	규격	단위	변경내역				비고
			당초	변경	증ㆍ감
상황반장	주간	hr	*****	***	*	**
	야간	hr	***	***	*	***
상황대기원	야간	일	***	**	*	*
제설작업원	주간	hr	*****	***	*	***
	야간	hr	*****	***	*	***
제설작업운전원	주간	hr	*******	*******	*	**
	야간	hr	*****	***	*	***
제설장비 상시대기	덤프(15톤)	hr	*	*	*	*
제설작업	덤프(15톤)	hr	*	**	*	**
제설장비 상시대기	굴삭기 (0.6[eqn: m ^{3}])	hr	*****	***	*	***
제설작업	굴삭기 (0.6[eqn: m ^{3}])	hr	***	*****	*	***
덤프트럭(월임대)유류비		hr	*****	*****	*	***
제설 상황실	3[eqn: m]*9[eqn: m]	동	*	*	*

※ 1차 정산분 이후 '22.12월 비상근무로 발생된 용역비 정산금액을 2차분에 포함하여 정산처리

□ 사업비 변경내용

공 종	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
*****	***********	***********	*************
*****	***********	***********	*	****
*****	***********	***********	*************

□ 조치계획

○ 상기 검토보고 내용과 같이 비상근무 발령에 의거 공종별 실제 근무한 사항에 대하여 정산 설계변경을 시행하고자 함.

붙임 1. 예산 재배정 공문 1부.

2. 설계변경내역서(총차분, 2차분) 2부.

3. 합의각서 2부.  끝.