문서번호	시설개선과-2582
결재일자	2023. 3. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
박병규		이균형	03/24
			오종범
협조	운영기획과장		박대군
	주무관		배성호

- 2023년 잠실야구장 환경개선공사 -  설계변경(1차-최종) 검토 보고

2023. 3.

체육시설관리사업소

(시 설 개 선 과)

- 2023년 잠실야구장 환경개선공사 -

설계변경 (1차 - 최종) 검토 보고

"2023년 잠실야구장 환경개선공사" 에 대한 시행 중 실제시공에 따른

변경사항에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 함.

□ 근    거

○ 시설개선과-2439(2023. 3 .21.) "시공사 실정보고 검토 보고"

○ 잠운본 2023호(2023. 2. 27.) "잠실야구장 1층 중앙로비 확장공사 요청"

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2023년 잠실야구장 환경개선공사

○ 공 사 비 : **********

*****************************

○ 공사기간 : 2023. 2. 20.~3. 29.

○ 시 공 자 : ******************

○ 공사내용

- 지붕층 난간설치 378m, 3층 관람석 진입로 경사보수 466㎡

- 1루 105블럭 물고임 보수 1개소, 관람석 난간 재도장 678㎡

- 전광판 카메라 중계석 보수 1식, 덕아웃 기자석 야구망 설치 2개소

○ 추진경위

- 2023. 1. 13. : 발주방침

- 2023. 1. 18. : 공사발주

- 2023. 2. 20. : 공사계약 및 착공

- 2023. 2. 27. : 잠실야구장 관리본부 의견 접수

- 2023. 3. 17. : 시공사 실정보고

- 2023. 3. 21. : 시공사 실정보고 검토보고

□ 설계변경 내용

○ 사 유 : 야구장 관리본부 요청사항 및 현장여건 반영

○ 내 용

연번	공 종 명	내 용	수 량	공사비(천원)	비 고
1	덕아웃 그물망 위치변경 설치	사용자 의견 반영	1식	-	증•감 없음
2	중앙로비 공간 확충	관람객 안전 확보	1식	******	*
3	관람석 난간 방청 페인트 소재변경	품질 확보 (에폭시→에나멜)	678㎡	*****	*
4	3층 진입로 그레이팅 교체(추가)	현장여건 반영	15개소	*****	*
계(제경비 *******)					**********

□ 계약금액 조정

○ 공사비 증․감 내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비	***********	***********	**********
도 급 비	***********	***********	**********
관급자재비	**********	**********	*

************************

□ 조치의견

○ 실제 시공에 따른 변경사항에 대하여 설계변경 추진.

붙임  : 1. 시공사 실정보고 검토 보고서 1부.

2. 설계변경내역서 및 도면, 계약금액조정검증확인서 각 1부.  끝.