문서번호	기반시설과-1843
결재일자	2023. 3. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이준범		이병철	03/27
			김종호
협조

「한강공원 매점(난지1,2호)리모델링공사」

냉난방기 실외기 구매 검토 보고

2023. 03.

한강사업본부

(기반시설과)

「한강공원 매점(난지 1,2호) 리모델링 공사」

냉난방기 실외기 구매 검토 보고

당초 구매한 관급자재(냉난방기 실외기)에 대해 실외기 필요공간(높이)이 확보되지 않아 설치 가능한 실외기를 사급자재로 변경구매·설치하고자 검토 보고드림.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 실정보고 검토(감리) 보고[아이씨디건축사무소-23-06('23.03.23.)호]

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명: 한강공원 매점(난지1,2호)리모델링 공사

□ 공사기간: 2022.11.14.~2023.04.10.

□ 도 급 비: 459,547,000원

□ 도 급 사: (주)하나건설이앤씨

□ 감 리 사: 주식회사 아이씨디플랜건축사사무소

Ⅲ		보 고 내 용

□ 당초 관급자재로 구매한 냉·난방기 자재중 실외기와 관련하여 필요한 공간(높이)이 확보되지 않아 설치가능한 실외기로 변경구매가 필요함.

○ 당초 구매한 실외기는 상부로 바람이 토출되는 방식으로 충분한 공간(********)이 확보 되어야 하나 ****** 높이 부족

***	***

○ 전면으로 토출되는 방식으로 실외기 구매가 필요*******

□ **************************************************************************************************************

□ 단가 및 물량 검토

************

******************************************************************************

**	***********	****
***	**********	**********
***	**********	**********
*	***********	***********

****************************

□ 공사비 증감 현황

(단위: 원)

***		**	**	***
***	****	***********	***********	***********
	*****	**********	**********	************
	*	***********	***********	************

※ 제경비 포함 제외 항목

□ 감리 검토 의견

○ 실외기 토출 방식 변경 구매는 적정하며, 단가 및 수량 검토 결과 적정함.

Ⅳ		조 치 의 견

□ 당초 관급자재로 구매한 실외기 설치시 안전상 문제가 발생하여 설치가 불가한 실정으로 실외기 토출 방식을 변경하여 구매함이 타당하며, 감리의견과 같이 단가 및 물량 검토 결과 적정함.

□ 추후 계약금액 조정시 공사 물량 및 단가, 금액을 확정코자함.

붙임  실정보고 검토 보고 1부.  끝.