문서번호	토목과-4026
결재일자	2023. 3. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	부구청장 제174호

주무관		도로관리팀장		토목과장		안전건설교통국장		부구청장
이창수		허율		김영훈		신용철		03/27
								유보화
협조
	기획재정국장		문성수
	재무과장		김영규
	계약팀장		황미란

설계변경(3차-정산) 시행 계획 보고(2022/23년 성동구 제설작업 민간위탁 용역)

- 2022/23년 성동구 제설작업 민간위탁 용역 -

설계변경(3차-정산) 시행 계획 보고

2023. 3.

(토 목 과)

- 2022/23년 성동구 제설작업 민간위탁 용역 -

설계변경(3차-정산) 시행 계획 보고

2022/23년 겨울철 제설대책 종료에 따라 「2022/23년 성동구 제설작업 민간위탁 용역」의 설계변경(3차-정산) 후 준공처리코자 함

Ⅰ		사업개요

□ 공 사 명: 2022/23년 성동구 제설작업 민간위탁 용역

□ 기    간: 2022. 11. 4. ∼ 2023. 3. 31.

□ 위    치: 성동구 관내 일원

□ 규    모: 덤프트럭 제설작업 1,290hr, 백호 작업 195hr, 제설작업원 4,950hr

□ 계 약 자: 대산중기 대표 이승규

□ 도 급 액: 400,000천원

Ⅱ		보고내용

□ 설계변경 사유

○ 당초 예산 범위 내 추정물량으로 설계 후 강설현황에 따른 비상근무 결과를 반영하여 정산

○ 제설함 보충, 제설제 입고, 제설함 회수, 제설창고 정리 등에 따른 공종별 작업물량 정산

□ 주요 변경내용

공 종	규 격	단위	수량		비 고 (증·감)
			당초	변경
제설장비 작업	15톤 덤프	hr	405	347.5	감 57.5
제설장비 작업	백호 0.6㎥	hr	195	131.5	감 58.5
제설장비 작업	4.5톤 덤프	hr	150	86.5	감 63.5
제설장비 작업	2.5톤 덤프	hr	735	794	증 59
제설 작업원	작업반장 및 작업원	hr	4,950	4,586	감 364

Ⅲ		조치계획

□ 상기와 같은 사유로 아래와 같이 설계변경 및 정산 처리코자 함

※ 예산과목: 붙임 참조

□ 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
총 용 역 비		400,000,000	348,416,000	감	51,584,000
도급비	공급가액	363,636,364	316,741,819	감	46,894,545
	부 가 세	36,363,636	31,674,181	감	4,689,455
	합 계	400,000,000	348,416,000	감	51,584,000

※ 전회 기성액: 299,416,000원

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 예산현황 1부.

3. 22/23년 제설대책 종료 보고 1부.  끝.