문서번호	설비부-4619
결재일자	2023. 3. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
이준희		곽용길	03/28
			신용휴
협 조

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사』

실정보고 사항에 대한 검토보고

2023. 3.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사』

실정보고 사항에 대한 검토보고

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사』관련, 건설사업관리단으로부터 서부도로사업소 업무협의 결과 등에 대한 실정보고 건에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사

○ 위    치 : 서울특별시 마포구 상암동 월드컵경기장교차로 일대

○ 규    모 : 지하차도 신설(L=540m), 도로 확폭(L=582m)

○ 계약기간 : '19.10.16. ~ '23.04.07.

○ *******************

○ ************************************************

2		관련근거

○ CCTV 및 교통관제장비 변경 실정보고 [제2자유입건 제2023-83호 ('23.03.27.)]

3		감리원 실정보고 내용

**************************

*****************************************

***************************************

***********************************************

4		검토내용

******************

********************************

**************************************************************

*******************

*************

****************

********************************************

*********************

*******************************************

○ 수량 및 직접공사비 증·감 현황

(단위:  원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
**********	**********	*********	************
**********	**********	**********	************	*************************
********	**********	**********	************

○ 적용단가 검토

- 수량 증가분은 기존 계약 단가 적용

- 신규단가는 설계변경 당시 산출단가에 낙찰율(85.427%)을 곱한 금액 적용

○ 공사비 증·감 현황

(단위:  천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
***	*******	*******	**********

○ 건설사업관리단 검토의견

*************************************************************************

**************************************************************************************************

5		보고자의견

○ 건설사업관리단의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 승인하고, 추후 설계변경에 반영하고자 함.

붙임  1. 건설사업관리단 및 시공사 공문 각 1부.

2. 서부도로 사업소 회의록 1부.  끝.