문서번호	정수시설과-1934
결재일자	2023. 3. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
배용우		이호완	03/28
			정미선
협 조
	주무관			양은영
	주무관			권이삭

- 뚝도아리수정수센터 인입케이블 교체공사 설계용역 -

설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 3.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

- 뚝도아리수정수센터 인입케이블 교체공사 설계용역 -

설계변경(정산) 검토 보고

뚝도아리수정수센터 인입케이블 교체공사 설계용역과 관련하여 보험료 정산 감액에 따른 계약금액 변경으로 설계변경(정산)코자 보고 드림

□ 사업개요

ㅇ 용 역 명 : 뚝도아리수정수센터 인입케이블 교체공사 설계용역

ㅇ 계약기간 : 2023.1.9. ~ 3.30.

ㅇ 계약금액 : ***********

ㅇ 계 약 자 : ****************

ㅇ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비,시설비

□ 설계변경 사항

ㅇ 변경사유 : 손해보험료 정산 감액

ㅇ 설계변경 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총사업비	*********	*********	********
공급가액	*********	*********	********
부가가치세	*******	*******	********

□ 조치계획

ㅇ 설계변경(정산)에 따른 변경계약 실시 후 준공처리

붙임 1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경사유서 1부.

3. 증빙자료 및 합의각서 각1부.  끝.