문서번호	도시정비과-3368
결재일자	2023. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		공공개발팀장		도시정비과장
이영진		유장원		03/29
				오승민
협 조

(구)노량진취수장 개선사업 예산 재배정 계획

2023. 3.

균형발전본부

도시정비과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

(구)노량진취수장 개선사업 예산 재배정 계획

(구)노량진취수장 개선사업의 원활한 추진을 위해 건설폐기물처리용역 예산 재배정계획을 보고 드림

Ⅰ		사업 개요

□ 개요

ㅇ 위치 : 동작구 본동 5-2번지 일대

ㅇ 규모 : 지하1층/지상1층, 연면적 687.78㎡(사업대상면적4,000㎡)

ㅇ 용도 : 제2종근린생활시설(휴게음식점)

ㅇ 총사업비 : *********************

ㅇ 사업기간 : '21. 1.~ '24.12.

ㅇ 사업내용 : 옥상 조망공간, 보행자 및 자전거 이용자 편의시설 조성

ㅇ 추진주체 : 동작구청

ㅇ 공사방법 : 서울시 예산 재배정을 통한 자치구(동작구청) 시행

□ 추진경위

ㅇ '20.12.16 : 노들섬과 주변지역 활성화를 위한 마스터플랜 수립 용역 준공

- (구)노량진취수장 재생사업 신규사업 제안

ㅇ '21. 3.17. : (구)노량진취수장 개선사업 추진계획 수립

ㅇ '21. 3.29. ~ 6.21. : 정밀안전진단용역 ***********

ㅇ '22. 3. 8. ~ '23. 1. : 설계용역 **************

ㅇ '22.12.28. : 공사및감리계약 *************************

ㅇ '23. 1.27. ~ 3.11. : 지질조사용역 **************

□ 추진일정

ㅇ '23. 3.31. : 남부수도사업소 연간단가업체 이전 완료

ㅇ '23. 4월 : 건설폐기물처리용역 발주

ㅇ '23. 4월~'24. 5월 : 리모델링공사 착공 및 준공

Ⅱ		예산 재배정 계획

□ 재배정 개요

ㅇ 재배정 목적 : 건설폐기물처리용역 발주

ㅇ 재배정처 : 동작구청 핵심정책추진단

ㅇ 금액 :  **************************

	총공사비	기배정액	금회배정액	배정잔액
시설비	*************	*********	**********	*************

ㅇ 예산과목

- 균형발전본부 도시정비과, 지속가능한 역사문화도심, 도심역사문화자원관리, (구)노량진취수장 개선사업, 시설비및부대비, 시설비

□ 재배정 조건

ㅇ 재배정 사업 추진 외 타용도로 사용 불가

ㅇ 향후 예산 집행계획 변경 시 서울시와 사전 협의

붙임  1. 용역 발주 공문 1부.
2. 용역설명서 1부.
3. 과업내용서 1부.
4. 설계내역서 1부.  끝.