문서번호	정수시설과-986
결재일자	2023. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
윤기영		03/29
		代노성제
협조
	주무관		노운학

토목 건축 시설물 정비계획 및 작업지시(4차)

2023. 3.

구의아리수정수센터

정수시설과

토목·건축 시설물 정비계획 및 작업지시(4차)

정수센터 토목·건축 시설물 중 노후 등으로 인한 보수·정비 및 환경개선이 필요한 시설물에 대하여 다음과 같이 작업지시하여 조치하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2023년 구의아리수정수센터 토목·건축 시설물 유지관리공사

○ 계약금액 : 386,921,700원

○ 공사기간 : 2023. 3. 13. ~ 2024. 6. 30.

○ 도 급 자 : 국성산업개발㈜ 대표 박동식

□ 보고내용

○ 점검자 : 이용성, 노운학, 윤기영

○ 현황 및 조치의견

연번	위 치	점검 결과 및 현황	조치 의견	비고
1		제2정수장 착수정 사다리 등받이 접속부가 일부 분리되어 정비 요구됨.	· 착수정 사다리 등받이 용접 : 3개소
2		농축조에 사다리가 없어 출입시 위험한 현황으로 출입 계단 설치 요함.	· 1-1, 2-1 농축조 출입 계단 설치 : 계단 3㎡×2개소 안전난간 11m×2개소
3		농축조 그레이팅 노후되어 통행에 위험하여 정비 요구됨.	· 농축조 그레이팅, 안전난간 설치 : 그레이팅 1.4m×2.1m×4개소 안전난간 설치 20m

○ 소요예산：금14,000,000원（상수도사업비,영업비용,정수비,수선유지교체비,수선유지비）

○ 작업기간：2023.3.29. ~ 2023.6.27.

□ 행정사항

○ 상기 사항에 대하여 『2023년 구의아리수정수센터 토목‧건축 시설물 유지관리공사』 업체에 지시하여 정비 시행하도록 하고,

○ 신규공종 및 물량증감에 대하여는 추후 설계변경시 반영하고자 함

붙임 : 작업지시서 1부.  끝.