문서번호	시설관리과-5671
결재일자	2023. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
김동규	代조영범	유명은		03/29
				신정철
협 조

『2022년 전기설비 유지보수 공사(장기2차)』

준공기한 연기 검토보고

2023. 3.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『2022년 전기설비 유지보수 공사(장기2차)』

준공기한 연기 검토보고

우리 사업소에서 시행중인 「2022년 전기설비 유지보수 공사(장기2차)」의 준공기한 연기 사유가 발생하여 계약기간을 변경코자 검토한 내용을 보고드림.

Ⅰ	공사개요

○ 공 사 명 : 2022년 전기설비 유지보수 공사(장기2차)

○ 계약상대 : ******************

○ 계약금액 : ******************************

○ 공사기간 : 2023. 01. 01. ~ 03. 31.

○ 공사내용 : 아리수올림터·배수지 등 노후 전기설비 보수 및 긴급복구 공사

Ⅱ	검토내용

○ 연기사유

- 개봉동 소출수 민원사항 해소를 위해 가압펌프 설치(급수운영과)

- 상기 가압펌프 전력공급을 위한 전기설비 공사 이행기간 부족

○ 공사기간 변경(30일 연장)

- 당초 : 2023. 01. 01. ~ 03. 31.

- 변경 : 2023. 01. 01. ~ 04. 30.

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

○ 현장사진

전기설비(분전반) 설치 예정 지점	펌프 설치(예정) 맨홀

Ⅲ	검토자 의견

○ 도급사에 공기 연장 통보 및 합의서 작성 후

○ 행정지원과에 변경계약 의뢰하고자 함.  끝.