문서번호	수변감성도시과-2332
결재일자	2023. 2. 20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	토양지하수팀장	수변감성도시과장
김태형	김종희	02/20
		박홍봉

2023년 토양오염실태조사 시료채취 용역 시행 계획

2023. 2.

수변감성도시과

2023년도 토양오염실태조사 시료채취 용역 시행 계획

토양오염 우려지역의 선제적인 실태조사를 위한 시료채취 용역을 시행하여, 토양오염에 따른 시민건강 저해 및 환경상 위해 예방

□ 관련근거

ㅇ 「토양환경보전법」제5조제2항

- 시·도지사, 구청장은 관할구역 중 토양오염이 우려되는 지역에 대해 토양오염실태를 조사하여야 함

ㅇ 「토양오염실태조사지침」(환경부 예규)

- 조사 목적, 방법, 조치사항 등 세부사항 규정

□ 추진경과

ㅇ 2023년도 토양오염실태조사 계획 수립(1.11., 국장방침)

ㅇ 기술용역 타당성 심사 결과: 적정(1.16.)

ㅇ 용역 계획 사전 공개 결과 별도 의견 없음

- 조달청 나라장터(2.13.~2.18.), 서울시 계약마당(2.13.~2. 18.)

ㅇ 자치구로부터 조사대상 255개소 수합: 완료(2.13.)

→ 한강환경유역청과 선정대상 적정성 협의(~2.22.)

□ 용역 시행 계획

ㅇ 용 역 명 : 2023년 토양오염실태조사 시료채취 용역

ㅇ 용역기간 : 계약일 ~ ’23.10.31.

ㅇ 용역내용

- 대상지점 255개소에 대해 심토굴착 및 시료채취 268공

- 시료채취 지점 GPS 측위조사 및 굴착지점 복원

ㅇ 용 역 비: 76,583천원

ㅇ 낙찰자 결정방법

ㅇ 계약방법: 일반경쟁입찰(적격심사)

ㅇ 입찰참가자격

- 단 독 입 찰: 「토양환경보전법」제23조의2에 따른 토양관련전문기관     중 토양오염조사기관으로 지정 받은 자

- 공동수급입찰: 「토양환경보전법」제23조의2에 따른 토양관련전문기관 중 토양오염조사기관으로 지정 받은 자가 70%, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제44조에 따른 측지측량업, 공공측량업, 일반측량업, 연안조사측량업, 공간영상도화업, 영상처리업, 지하시설물측량업으로 등록한 자가 30%의 분담비율로 공동수급입찰 가능

ㅇ 낙찰자 결정방법

- 예정가격 이하로서 낙찰하한율(87.745%) 이상 최저가격으로 입찰한 순으로

적격심사하여 종합평점 95점 이상인 자

□ 향후일정

ㅇ 2023. 2월 : 한강환경유역청과 조사대상 지점 협의 완료

ㅇ 2023. 2~3월 : 용역 계약 의뢰 및 계약체결(재무과)

ㅇ 2023. 3~10월 : 시료채취 용역 시행

ㅇ 2023. 4~11월 : 채취 시료 토양오염도 분석(보건환경연구원)

- 시료 분석을 위한 재료비 5,760천원 보건환경연구원에 재배정(’23.2.3.)

ㅇ 2023. 12월 : 2023년 토양오염실태조사 결과보고(환경부)

붙임  1. 과업내용서 1부.

2. 산출내역서 1부.  끝.