문서번호	시설관리과-5711
결재일자	2023. 3. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
이연한	신동철	03/30
		권승계
협 조
	시설관리팀장		김용섭
	주무관		임복섭

2023년 장기사용 배급수관 정비공사

(연간단가) 시행계획

2023. 3.

서부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2023년 장기사용 배급수관 연간단가 시행계획

2023년 장기사용 배급수관 정비 대상 구간 중 연간단가 계획구간을 조기 정비하여 수질민원 및 누수요인을 사전에 차단하고 깨끗하고 안전한 수돗물을 수요가에 공급하고자 함.

1		추진배경

□ 추진근거

○ 2023년 장기사용 배급수관 정비계획 알림(누수대응과-28775,‘22.12.30.)

2		추진계획

□ 은평구 정비목표 : 2.0㎞, 2,515백만원

○ 사업시행 계획

(단위 : m, 백만원)

구 분	계		단위사업			연간단가
	연 장	사업비	건수	연장	사업비	연장	사업비
은 평 구	2,000	2,512	1	1,323	1,600	677	912

□ 정비계획

○ 은평구 2.0㎞ 중 단위사업으로 1,323m 발주하고, 연간단가 677m는  '22년 은평구 관내 상수도공사(장기계속단가)외 2개사 계약업체에 작업지시하여 조기에 정비 완료하고자 함.

○ 연간단가 정비구간

연번	동	위 치	정비대상			정비계획		비 고 (시행업체)
			관종	구경 (㎜)	연장 (m)	구경 (㎜)	연장 (m)
계		9구간			1,466.7		1,466.7
1	녹번동	171-1 ~ 170-1	DCIP (1985)	100	29.8	150	29.8	급수공사 (상반기)
2	역촌동	2-11 ~ 2-136	DCIP (1985)	80	92	150	92	급수공사 (하반기)
3	역촌동	61-51 ~ 61-33	DCIP (1985)	100	69.9	150	69.9	급수공사 (상반기)
4	역촌동	48-33 ~ 48-1	DCIP (1986)	80	160	150	160	급수공사 (상반기)
5	불광동	불광동69~불광동산24	DCIP (1986)	200	150	200	150	시설물 (하반기)
6	진관동	진관동161-15~진관동161-14	DCIP (1986)	200	90	200	90	시설물 (하반기)
7	불광동	13-9 ~ 19-1	DCIP (1986)	150	150	150	150	누수복구 (상반기)
8	불광동	19-35~16-111	DCIP (1986)	150	150	150	150	누수복구 (상반기)
9	녹번동	162-10 ~ 162-76	DCIP (1986)	80	85	150	85	시설물 (상반기)
10	녹번동	162-76 ~ 80-34	DCIP (1986)	80	130	150	130	시설물 (상반기)
11	불광동	353-19 ~ 345-52	DCIP (1986)	80	180	100	180	급수공사 (상반기)
12	응암동	101-1 ~ 101-78	DCIP (1986)	80	180	150	180	급수공사 (상반기)

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(장기사용 배급수관 정비, 사업코드 22108)

3		조치계획

○ '23년 장기사용 배급수관 정비공사 구간중 연간단가로 시행할 677m는 정비목표 조기 달성을 위해 '22년 은평구관내 상수공사, '22년 상수도시설물설치 및 보수공사, 긴급누수복구 업체에 작업지시하여 정비코자 하며,

○ '23년 정비목표 달성 후 사업예산 확보 및 추가배정시 장기사용 배급수관을 추가정비하여 깨끗하고 안전한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 정비구간 위치도 1부.  끝.