아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	『2022년 전기설비 유지보수 공사(장기2차)』 변경계약 의뢰

우리 사업소에서 시행중인 『2022년 전기설비 유지보수 공사(장기2차)』건과 관련하여 기한내에 긴급민원 해결이 불가함에 따라 계약기간 변경계약을 의뢰하고자 합니다.

1. 계약건명 : 2022년 전기설비 유지보수 공사(장기2차)

2. 계약상대 : ******************

3. 계약기간 : 2023. 1. 1. ~ 3. 31.

4. 계약금액 : ******************************

5. 변경사유 : 긴급민원 해소를 위한 준공기한 연기

6. 변경내역

구 분	당초	변경	비고
계약금액	***********	***********	변동없음
계약기간	****************	****************	30일 연장

7. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비
(아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리, 22205)

붙임 : 1. 민원 조치계획서 1부
2. 준공기한 연기 검토보고서 1부
3. 합의서 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	김동규		기전팀장	양창진		주무관	이은옥		시설관리과장	03/30
代정수용
협조자	주무관	장예림
시행	시설관리과-5796	(	2023. 3. 30.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4024	/전송	02-3146-4039	/	tadkim88@seoul.go.kr	/	부분공개(5)