아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		강 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	안전사고 방지 현장대응단 노후 차고문 납품일자 변경

1. 소방행정과-2013(2023.02.27.)호 「안전사고 방지 현장대응단 노후 차고문 교체」

2. 안전사고 방지 현장대응단 노후 차고문 교체와 관련 업체 자재수급에 따른 납품일자 변경을 다음과 같이하고자 합니다.

가.건    명 : 현장대응단 차고문 교체

나.설치업체 : 블루코스텍*************************************

다.변경사유 : 자재수급 일정지연에 따른 변경요청

라.납품변경일자

○ 기존납품일자 : 2023.04.02.(일)

○ 변경납품일자 : 2023.04.28.(금)  끝.

담당자	이기천		장비회계팀장	고주석		소방행정과장	03/31
최연웅
협조자
시행	소방행정과-3154	(	2023. 3. 31.	)	접수		(		)
우	01193	서울특별시 강북구 한천로 911 소방행정과 장비회계팀	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6946-0122	/전송	02-6946-0114	/	skandi178@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)