급수공사 연기 보고서(신설-173)

시    행

급수운영과-5239

시행일자

2023. 3. 31.

수 신 자

내부결재

접수번호

접수일자

공개여부

부분공개(6)

주무관		급수운영팀장	급수운영과장			결재
최성현		代박준기	03/31
			이규희
협 조

명에 의거 방이동 외 14개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 합니다.

□ 공사현황

○ 공　사　명: 2022년 방이동 외 14개동 상수도공사

○ 계약상대자: 부기건설(주) 대표 오만택

□ 연기내역

연번	주 소	지시번호	당초	변경	비고
1	가락동 166-12	신설-173	2023.3.23.~ 2023.3.31.	2023.3.23.~ 2023.4.14.

○ 연기사유

- 연번 1: 공사현장 자재적치 및 건축공사 공정상 수요가에서 공사 연기요청

□ 지체상금 부과여부

○ 지체상금 미부과

□ 조치의견

○ 변경 공사기간으로 연기.

끝.