아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연장 의뢰[화랑대역 공영주차장 소방설비 이전설치 공사]

우리 본부에서 시행 중인『화랑대역 공영주차장 소방설비 이전설치 공사』와 관련하여 아래와 같이 준공기한 연장을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명: 화랑대역 공영주차장 소방설비 이전설치 공사

2. 변경내용

계약번호	계약자	계약금액(원)	준공기한		비고
			당초	변경(연장)
**************	*********	157,667,000	2023.04.10.	***********	****

3. 변경사유

- 선행공종(건축)지연에 따른 후속공종(소방) 준공기한 연장

붙임  1. 방침서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	설 비 부 장
주무관	이승준		설비총괄과장	장병선		설비부장	04/03
신용휴
협조자
시행	설비부-4988	(	2023. 4. 3.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2316	/전송	02-6438-2399	/	fj1123@seoul.go.kr	/	부분공개(5)