문서번호	정수시설과-2112
결재일자	2023. 4. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
배용우		이호완	04/03
			정미선
협 조
	주무관			양은영

뚝도아리수정수센터 인입케이블 교체 계획

2023. 3.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

뚝도아리수정수센터 인입케이블 교체 계획

우리 정수센터 인입케이블 교체계획을 수립하여 안정적인 전력 공급으로 아리수 생산공정에 만전을 기하고자 함

□ 시설현황

뚝 도 정수센터		공급변전소		공급 전압 (kV)	한전PAD ~ 송수주전기실	인입 선로 (m)	선로 합계 (m)	설치 년도
		S/S	D/L		인입케이블(㎟)
정수장	**	**	**	****	***************	***	***	****
	**	**	**	****	***************	***	***	****

□ 추진배경

ㅇ ********************************************************************

ㅇ ******************************************************************

□ 추진방향

ㅇ 설계용역(3월완료) → 관급자재(케이블) 구매 → 공사 및 감리용역 → 사업완료

※ 인입케이블 교체공사의 경우 한국전기안전공사 공사계획신고 대상

□ 사업예산

(단위:천원)

구 분	계	세부내용
합 계	*******	*
시설비	*******	*********************************
감리비	******	*****

□ 추진계획

ㅇ 관급자재(물품)구매

- 건    명 : 전력케이블 구매(뚝도아리수정수센터 인입케이블 교체공사)

- 사업기간 : 계약일로부터 45일

- 소요예산 : ********

- 계약방법 : ******

·입찰참가자격

▷ ***********************************************************************************************

▷ ****************************************************************************************************************************

**************

- 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비(시설비)

ㅇ 전기공사

- 사 업 명 : 뚝도아리수정수센터 인입케이블 교체공사

- 사업기간 : 계약일로부터 3개월

- 소요예산 : ********

********************************************

- 계약방법 : ********

·입찰참가자격

▷ *********************************************************

- 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비(시설비)

ㅇ 감리용역

- 사 업 명 : 뚝도아리수정수센터 인입케이블 교체공사 감리용역

- 사업기간 : 계약일로부터 4개월

- 소요예산 : ********

- 계약방법 : *********

·사유 : **************************************************************

- 계약업체 : ************************

- 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비(감리비)

□ 발주전 사전검토

검토사항	검토결과	심시기관	기 준
계약심사	대상	본청 본부	물품(추정금액 2천만원 이상) 공사(추정금액 1억 ~ 3억)
사전규격공개	대상	-	물품(추정가격 5천만원 이상)
특정제품 선정심사	비대상	-	동일 특정제품 합계 2천만원 초과

□ 향후일정

ㅇ 계약심사 의뢰 및 사전규격공개          : '23.04.

ㅇ 물품 납품 및 공사·용역 계약            : '23.04. ~ 05.

ㅇ 공사 및 용역 시행                      : '23.06. ~ 08.

ㅇ 사업완료 및 준공                       : '23.09.

붙임 : 설계내역서(공사) 1부.  끝.