문서번호	치수과-1921
결재일자	2023. 4. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	치수과장
김한성	04/03
	김수영

- 염창나들목 리모델링 공사 -

실정보고에 대한 검토보고

2023. 3.

한강사업본부

(치  수  과)

- 염창나들목 리모델링 공사 -

실정보고에 대한 검토보고

『염창나들목 리모델링 공사』관련 서울시설공단 실정보고 사항  (추가공사 설계비 반영)에 대한 검토 및 처리계획을 보고드림

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 염창나들목 리모델링 공사

ㅇ 공사기간 : 2021.09.08 ~ 2023.06.30.

ㅇ 공사규모 : 차수벽 철거, 육갑문 및 E/V설치, 나들목 내·외부 환경개선

*****************************************

**********************

ㅇ 공사감독대행 : 서울시설공단 공사감독 1처

□ 보고내용

ㅇ 관련근거

- 치수과-1143호(2023.2.27.)『염창나들목 리모델링공사 추가공사 시행 검토보고』

- 공사감독1처-1317(2023.3.28.)호『실정보고 검토보고(추가공사 설계비 반영)』

- 염창 2022-45(2023.3.27.)호『실정보고(제외지_추가공사에 시행에 따른 설계비용 반영)』

ㅇ 제외지 추가 공사 시행에 따른 설계비용 반영 요청

- 제외지 제방 주민 휴게시설(계단 및 그늘막) 및 노후화된 전망데크 재정비 공사 설계비

- 제방 사면 휴게시설을 위한 사면안정성 검토 및 전망데크 확장에 따른 구조검토비

(단위 : 천원)

구분	규격	단위	수량	단가	변 경 사 항			비고
					당초	변경	증·감
설계도서 작성	휴게시설	식	1	22,000	-	22,000	22,000	견적단가
사면안정 검토	제외지사면	식	1	12,000	-	12,000	12,000
구조 검토	전망데크	식	1	2,500	-	2,500	2,500
조감도 작성		식	1	2,500	-	2,500	2,500
소 계					-	39,000	39,000

ㅇ 해당공종 개략공사비 증·감 현황

(단위: 원)

구분	당초	변경	증·감	비고
도급비	-	42,900,000	증) 42,900,000
공급가액	-	39,000,000	증) 39,000,000
부가세	-	3,900,000	증) 3,900,000

□ 검토내용

<서울시설공단>

ㅇ 발주청에서 요청한 제외지 추가공사 시행을 위한 공사 설계, 사면안전 검토 및 구조검토를 위한 설계비용 반영은 타당한 것으로 검토됨.

ㅇ 추정 공사비 9억에 대하여 엔지니어링 사업대가의 기준, 3장 공사비 요율에 의한 방식으로 설계비를 검토한 결과 5.436%의 요율로 48,924천원(VAT 제외)으로 시공사에서 제출한 설계 견적단가 39,000천원은 적정한 것으로 검토됨.

<보고자 의견>

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 제 9장 공사계약 일반조건 제 6절 "7-다"에 따라 설계변경에 필요한 설계비를 계약상대자에게 지급하는 것이 타당한 것으로 검토되어 반영코자 함.

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 제 9장 공사계약 일반조건 제 6절 "5-가"에 따라 설계도서를 제출받아 검토 및 승인 후 공사 시행 후 설계변경에 반영하여 정산코자 함.

□ 조치계획

ㅇ 상기 검토내용과 같이 실정보고 사항 승인 통보(치수과→서울시설공단)

ㅇ 공사 시행중 안전관리 철저 및 추후 설계변경 시 반영

붙임 : 1. 서울시설공단 검토보고서 1부.

2. 시공사 실정보고서 1부.  끝.