아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시난지물재생센터
수신	한강유역환경청장(수질총량관리과장)
(경유)
제목	공공하수처리시설 운영관리 기준 준수 예외기간 7차 변경 협의 요청

1. 관련 문서

가. 한강유역환경청 수질총량관리과-13110(2022.9.23.)호

나. 한강유역환경청 수질총량관리과-14168(2022.10.17.)호

다. 한강유역환경청 수질총량관리과-2227(2023.02.13.)호

라. 한강유역환경청 수질총량관리과-3103(2023.03.06.)호

마. 한강유역환경청 수질총량관리과-4164(2023.03.28.)호

바. 한강유역환경청 수질총량관리과-4354(2023.03.31.)호

2. 우리 센터 총인처리공사 중 공공하수도의 유지관리기준 준수예외 기간 변경(6차) 협의 요청 건에 대해 공사일정이 변경되어 일부 기간을 변경하여 추가 사용하고자 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

○ 변경 사유 : 와이어 커팅 작업 지연 및 수문 기밀 보수공사로 잔여일수에서 3일 연장 사용

공종	공사명	변경 전	변경 후	비고
2처리장 6계열 유입관로#2 접합2지점	1단계 물돌리기 시점 (마대쌓기)	2023. 3. 27.(1일)	2023. 3. 27.(1일)
1처리장 유입관로#1 접합지점	벽체 철거 (벽제 커팅 및 뜰어내기)	2023.3.29.~3.30. 2023. 4. 3. (3일)	2023.3.29.~3.30. 2023. 3. 30. 2023. 4. 3. 2023.4.4.~4.6. (6일)	3일 증가
2처리장 4계열 유출관로#1 접합1지점	철거 및 텃파기	준수예외 기간 예측 불가 (추후 재 협의 예정) 잔여 일수 : 37일	준수예외 기간 예측 불가 (추후 재 협의 예정) 잔여일수 : 34일	잔여일수 3일 감소
2처리장 4계열 유출관로#1 접합1지점	담수 및 시험가동
혼합방류관로#2 접합지점	접합지점 철거
2처리장 4계열 유출관로#2 접합2지점	철거 및 터파기
2처리장 4계열 유출관로#2 접합2지점	철거 및 터파기

붙임  1. 예정공정표 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	송종봉		운영과장	04/03
김봉철
협조자
시행	운영과-999	(	2023. 4. 3.	)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8521	/전송	02-300-8544	/	sjbjja@seoul.go.kr	/	부분공개(5)