문서번호	녹색에너지과-7806
결재일자	2023. 4. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		에너지산업팀장	녹색에너지과장
이원준		代이원준	04/04
			김재웅
협조

서남물재생센터 주차장 태양광 발전설비 설치공사 실시설계용역 준공기한 연장 검토보고

「서남물재생센터 주차장 태양광 발전설비 설치공사」

실시설계 용역 준공기한 연장 검토보고

2023. 4.

기 후 환 경 본 부

(녹색에너지과)

「서남물재생센터 주차장 태양광 발전설비 설치공사」

실시설계 용역 준공기한 연장 검토보고

서남물재생센터 테니스 주차장 태양광 발전설비 설치공사 실시설계용역과 관련, 원활한 사업 추진을 위해 준공기한을 연기하고자 함

□ 실시설계 용역 개요

ㅇ 계약기간 : 2023.2.23 ~ 2023.4.8

*******************

********************

ㅇ 주요 과업내용

- 태양광 발전설비 설치 위치·일사량·음영여부 등 적정성 검토

- 발전전력 자가공급을 위한 전력간선 설계 및 모니터링 설계

사업 개요

◈ 사 업 명 : 환경기초시설 신재생에너지 보급사업(환경부 국고보조)

◈ 설치장소 : 서남물재생센터 테니스장 주차장(380㎡)

서남물재생센터(1,032,000㎡)	태양광 설치부지(테니스 주차장)

※ 일 시설용량 : 하수 163만톤, 정화조 4,000㎘

※ 태양광 발전설비 현황 : 5,083kW

***********************************

****************************************************

□ 용역 준공기한 연장 검토

ㅇ 연장근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 (행정안전부 예규)

-“계약상대자는 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우 계약기간 종료 전에 서면으로 연장신청 해야 한다.”

***************

**	****************************
**	****************************

**************

************************************

******

***************************************************

******************************************

□ 향후 계획

ㅇ 계약변경 의뢰	: '23. 4월
ㅇ 실시설계용역 준공	: '23. 5월
ㅇ 감리용역 및 물품구매	: '23. 5월
ㅇ 태양광 설치공사 착공	: '23. 6월
ㅇ 태양광 설치공사 준공	: '23.11월

붙임 : 1. 연장요청 공문 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.