문서번호	도시철도토목부-4126
결재일자	2023. 4. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
장대성		박형복	04/05
			류용열
협 조
	주무관			김봉성

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

터널 암판정 결과 반영 관련 실정보고 검토

2023. 4

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

터널 암판정 결과 반영 관련 실정보고 검토

건설사업관리단으로부터 제출된“터널 암판정 결과 반영 관련 실정보고”건에 대한 검토보고임.

※ 관련서류 : 동명감 진접1 제2023-133호(’23.04.05)

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

ㅇ 공사계약일반조건 제6절(공사 설계의 변경)의1. 가의 2)항

- 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

ㅇ 공사금액 : 108,680백만원 (6차공사 17,000백만원)

ㅇ 공사기간 : ’18.12.31.∼ ’24.10.29. (6차공사 ’23.4.1.∼’23.12.31.)

ㅇ 도 급 자 : ㈜케이씨씨건설

□ 추진경위

ㅇ 단선터널 암판정 [하 선]

- ’22.08.31.(수) 하선 STA 0km217.8, [설계 PS-4A,4B ⇒ 적용 PS-4A]

- ’22.12.05.(월) 하선 STA 0km155.8, [설계 PS-4A,4B ⇒ 적용 PS-4A]

- ’23.01.26.(목) 하선 STA 0km113.8, [설계 PS-4A    ⇒ 적용 PS-4A]

ㅇ 복선터널 암판정 [작업구#3 → 작업구#2]

- ’22.11.03.(목) 종점 STA 4km466.0, [설계 PD-6,5B ⇒ 적용 PD-5B]

- ’23.01.17.(화) 종점 STA 4km146.0, [설계 PD-5B,6 ⇒ 적용 PD-5B]

- ’23.03.02.(목) 종점 STA 3km988.5, [설계 PD-6    ⇒ 적용 PD-5B]

- ’23.03.06.(월) 종점 STA 3km973.5, [설계 PD-6    ⇒ 적용 PD-5B]

□ 건설사업관리단 보고내용

ㅇ 실정보고 사유

- 암판정 결과에 따른 시공 물량 변경 및 공사비 변경 필요

ㅇ 변경 현황

구 분	당 초			변 경			증 ․ 감
단선터널 <하 선 > 103.8/789.5/ - (금회/누계/잔여)	지보패턴	PS-4A PS-4B	61.83m 42.00m	지보패턴	PS-4A PS-4B	103.83m -	증) 감)	42.0m 42.0m
	수량	터널 굴착 숏크리트 타설 락볼트 설치 격자지보 강관다단보강 훠폴링설치	4,311㎥ 508㎥ 957개 95조 210공 260개	수량	터널 굴착 숏크리트 타설 락볼트 설치 격자지보 강관다단보강 훠폴링설치	4,343㎥ 543㎥ 934개 104조 255공 -	증) 증) 감) 증) 증) 감)	32㎥ 35㎥ 23개 9조 45공 260개
복선터널 377.5/3,850.2/126.0 (금회/누계/잔여)	지보패턴	PD-5B PD- 6	160.0m 217.5m	지보패턴	PD-5B PD- 6	377.5m -	증) 감)	217.5m 217.5m
	수량	터널 굴착 숏크리트 타설 락볼트 설치	27,138㎥ 1,139㎥ 606개	수량	터널 굴착 숏크리트 타설 락볼트 설치	27,138㎥ 1,139㎥ 1,283개	증)	- - 677개

ㅇ 단가 적용 현황

- 기존 계약내역의 물량증감에 대해 기계약 단가 적용

ㅇ 공사비 증·감 현황

(단위:천원)

구 분	공 사 비				비 고
	당 초	변 경	증 · 감
단선터널 암판정 및 패턴변경	*********	*********	**	******
복선터널 암판정 및 패턴변경	*********	*********	**	*******
▸직접공사비 계	*********	*********	**	*******
▸제 경 비	*********	*********	**	******
▸물가변동비(K1~K6)	*********	*********	**	******
▸도 급 액 계	*********	*********	**	*******
▸관급자재비	*******	*******	**	***
▸폐기물처리비	******	******	**	***
▸총 공사비	*********	*********	**	*******

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

- 단선 및 복선터널 암판정 결과 반영건에 대하여 공사계약 일반조건 제7절 1항에 의거 변경되는 공사비*************는 추후 설계에 정산 반영함이 적정한 것으로 판단됨

□ 조치의견

ㅇ 건설사업관리단의“터널 암판정 결과 반영 관련 실정보고”건에 대해 검토한 결과 적정한 것으로 판단되므로 승인 통보

ㅇ 향후 설계변경자문위원회 자문을 거쳐 정산·반영하여 사업추진에 만전을 기하고져 함.

붙 임 : 건설사업관리단 공문 1부.  끝.