문서번호	기반시설과-2158
결재일자	2023. 4. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이준범		이병철	04/05
			代김수영
협조

「한강공원 매점(난지1,2호)리모델링공사」

설계변경(2회) 검토 보고

2023. 04.

한강사업본부

(기반시설과)

「한강공원 매점(난지 1,2호) 리모델링 공사」

설계변경(2회) 검토 보고

실정보고 승인건 반영 및 준공전 보험료 정산 등 에 대한 설계 변경 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 설계변경 요청서[하나(한강)제22-19('23.03.29.)호]

□ 설계변경 감리자의견서[ICDP-23-07('23.03.31.)호]

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명: 한강공원 매점(난지1,2호)리모델링 공사

□ 공사기간: 2022.11.14.~2023.04.10.

□ 도 급 비: 459,547,000원

□ 도 급 사: (주)하나건설이앤씨

□ 감 리 사: 주식회사 아이씨디플랜건축사사무소

Ⅲ		추 진 현 황

□ '22.11.14.: 공사 착공

□ '23.02.09.: 설계(1회)변경

□ '23.04.05.: 설계변경(2회)위원회(내부) 개최

Ⅳ		보 고 내 용

□ 실정보고 승인건에 대한 설계변경

○ 징크판넬 교체 실정보고 검토 보고(기반시설과-1726('23.03.21.)호)

○ 물량 정산 실정보고 검토보고(기반시설과-1727('23.03.21.)호)

○ 냉난방기 실외기 구매 검토 보고(기반시설과-1843('23.03.27.)호)

□ 준공전 보험료 등 정산

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
산재보험료	*********	*********	***********
고용보험료	*********	*********	************
건강보험료	*********	*******	***********
노인장기 요양보험료	*******	******	***********
연금보험료	*********	*******	***********
퇴직공제부금비	*********	*********	***********
안전관리비	*********	*********	***********
기타경비	**********	**********	***********
환경보전비	*******	*	***********
건설기계대여지급보증서 발급수수료	*******	******	***********
고용개선지원비	**********	*********	***********
소 계	**********	**********	***********

□ 공사비 증감 현황

(단위: 원)

***		**	**	***
***	****	***********	***********	***********
	*****	**********	**********	***********
	*	***********	***********	***********

□ 공사소요기간: 증감없음

***	**	**	***
****	*********************	*********************	****

□ 조치 의견

○ 실정보고 승인 사항 반영 및 준공전 보험료 정산하여 총무과에 설계변경 요청후 준공.

Ⅴ		향 후 계 획

□ '23. 04. 10. : 공사 준공

붙임  1. 설계변경(2회) 요청서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 자문결과 검토 의견서 1부.  끝.