아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	재난안전통신망 시범운영 및 사용법 안내[재강조]

1. 관련근거

가. 전산통신과-1504(2021.4.15.)호「서울소방 재난안전통신망(PS-LTE)구축 계획」

나. 전산통신과-1144(2023.3.23.)호「서울소방 재난안전통신망 시범운영 계획」

다. 현장대응단-1950(2023.3.23.)호「재난안전통신망 시범운영일정 안내 및 사용법 재강조」

2. 위와 관련하여 재난안전통신망 시범운영을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 시범운영 기간: 2023.3.28.(화) ~ 2023.5.9.(화)까지

(시범운영기간 종료후에도 전면 전환시까지 재난안전통신망 사용)

※ 전면 전환 일자: 2023.6.1.(목) 09:00(예정)

나. 시범운영 내용

훈련 활용 [1단계]	○ 기 간: 계속 사용 중 ○ 대 상: 전 소방서
현장 사용 [2단계]	○ 기 간: 2023.3.28.(화) 09:00 ~ 2023.4.4.(화) 09:00까지 (1주간) ○ 대 상: 4권역(강남, 강동, 서초, 송파)/ 구조, 구급, 기타 출동 시 사용 ○ 그 룹: 4권역-구조구급 - 4권역 구조구급 및 기타 출동 시 재난안전통신망(PS-LTE)으로 운영 - 4권역으로 지원 출동 시 재난안전통신망 단말기[4권역-구조구급]으로 전환하여 출동
현장 사용 [3단계]	○ 기 간: 2023.4.4.(화) 09:00 ~ 2023.4.18.(화) 09:00까지 (2주간) ○ 대 상: 전 소방서/ 구조, 구급, 기타 출동 시 사용 ○ 그 룹: 각 해당 권역-구조구급 - 구조구급 및 기타 출동 시 재난안전통신망(PS-LTE)으로 운영 - 지원 출동 시 재난안전통신망 단말기[해당 권역-구조구급]으로 전환하여 출동
현장 사용 [4단계]	○ 기 간: 2023.4.18.(화) 09:00 ~ 2023.5.9.(화) 09:00까지 (2주간) ○ 대 상: 전 소방서/ 모든 출동 시 ○ 그 룹: 각 권역-구조구급, 각 소방서-화재비상 - 모든 출동 시 재난안전통신망(PS-LTE)으로 운영 - 지원 출동 시 재난안전통신망 단말기[해당 권역-구조구급 또는 화재비상]으로 전환하여 출동

다. 의견수렴 기간: 2023.5.12.(금)까지

4. 행정사항

가. 모든 대원들은 붙임을 참고하여 재난안전 통신망 단말기 사용방법을 숙지하시기 바랍니다.

나. 모든 재난안전 통신망 단말기를 최신 업데이트 및 인접서 단축키를 붙임3을 참고하여

설정하시기 바랍니다.

붙임  1. 제조사별 퀵가이드 1부.

2. 단말기 상세 매뉴얼 1부.

3. 단말기 업데이트 및 단축키 설정 방법 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
수신자	소방행정과장, 재난관리과장, 예방과장, 북가좌119안전센터장, 홍은119안전센터장, 북아현119안전센터장
상황실장	정혜윤		지휘3팀장	박귀호		현장대응단장	04/05
강기홍
협조자
시행	현장대응단-2234	(	2023. 4. 5.	)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182, 2층 지휘팀 (연희동, 서대문소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5510	/전송	02-2187-8353	/	1004godnd@seoul.go.kr	/	부분공개(6)