실정보고 검토서

(교대위치 변경에 따른 안전조치 반영)

공 사 명

청계천~정릉천 자전거도로 연결공사

공사개요

· 위    치 : 정릉천 및 청계천 합류부

· 사업기간 : '21.12. ~ '23.05.

· 총사업비 : 32억 원

· 시공사 : 태궁종합건설(주)

· 감리단 : 수성엔지니어링 외1개사

실정보고 건명

교대위치 변경에 따른 안전조치 반영

실정보고 사유

"관련근거 : 도로시설처-21200(2022.12.7) : 교량공사 전 안전조치 요청"

신설교량(L=30, B=5m) 가시설공 시행 중 *****************************************************내부순환로 교각 안전성에 대한 재검토 요청******************

건설사업관리단

검토의견

안전조치 요청에 따라 교각 구조물에 대한 영향을 재검토하여 *******************************************************************************************

공기에 미치는 영향

해당없음

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증·감)
규모	* * * * **************************** ****************	**************** ********************* ****************** ********************* ************************ ******************** ************************	**************** ********************* ****************** ******************** ************************ ******************** ************************
금액	*********	*********	***********

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 (    )

별도(추가) 예산 확보 필요   ( ㅇ )

추가 행정절차 이행 필요여부

설계변경자문회의 후 설계변경

발주처

검토의견

*********************************************************************************************************************

비 고

결재

주무관

노승환

도시고속도로과장

박장진

토목부장

04/07

이임섭

협조

주무관

홍현기