문서번호	도시철도설비부-3607
결재일자	2023. 4. 11.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
임형민		김이곤	04/11
			전계목
협 조

『별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사』

감리실정보고 검토

2023.  4.

도시철도설비부

(정보통신과)

『별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사』

감리 실정보고 검토

우리부에서 시행중인『 별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사 』와 관련,본선 및 정거장(BN2,BN3) 현장여건 반영 등의 실정보고에 대해 검토함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 별내선시감 제23-272호 (2023.04.03.)

- 별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사(본선 및 BN2,3 정거장)

현장여건 반영 실정보고서 검토보고

Ⅱ		사 업 개 요

□ 공 사 명 : 별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사

□ *************************

□ *****************************************

□ 공사기간 : (총차) ´21.05.21. ~´24.01.23.

(2차)  ´22.12.01. ~´23.05.31.

Ⅲ		감리 실정보고

□ 보고내용 : 시공사가 제출한 실정보고 내용의 적정여부 검토

□ 보고요약 (실정보고 세부내용 붙임1 참조)

가. 정거장 자동요금징수설비 장비위치 조정

***************************************************************************

나. BN2정거장 개구부 위치조정

*************************************

*********************************************

다. 복합통신설비 구매설치 전구간 시스템 검토결과 반영

**************************************************************************************************************************

라. 통신설비 고소개소 위험저감 대책 기술검토 결과 반영

**************************************************************

마. 복합통신 선로증폭기 및 터널방송 전원공급기 전원케이블 규격 검토결과 반영

***************************************************************************

바. 역사내 수유실 인터폰 및 여직원침실 비디오폰 설치 검토결과 반영

**********************************************

사. 감리지시 및 처리부 제2022-07호(‘22.09.06.) 반영

******************************************************************************

아. 설계도서 검토 결과(‘22.09.15. 공정회의) 반영

*****************************************************************

자. 터널비상방송용 전원선 규격변경 실정보고 반영

**********************************************************

차. (시방서-2.3.3_자동방송설비공사 라. 2. 나항) 회로분리 반영

************************************************************

□ 공사비 증감내역 (세부내역 붙임2 참조)

(직접비, 단위: 원)

구분		재료비	노무비	경비	합 계	비 고
	당초	***********	*************	*********	*************
합 계	변경	***********	*************	*********	*************
	증감	*********	**********	*	*************
	당초	***********	***********	*	***********
1. 본 선	변경	***********	***********	*	***********
	증감	*********	**********	*	*************
	당초	***********	***********	*****	***********
2. BN2	변경	***********	***********	*****	***********
	증감	*********	**********	*	*************
	당초	***********	***********	*****	***********
3. BN3	변경	***********	***********	*****	***********
	증감	**********	*********	*	************

Ⅳ		검토의견

□ 감리단 검토의견

ㅇ **********************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 보고자 검토의견

ㅇ ********************************************************************

Ⅴ		행정사항

ㅇ 실정보고 승인 통보(도시철도설비부 → 감리단)

ㅇ 설계변경 자문(소)위원회 개최 및 설계변경 실시

붙임	1. 실정보고 세부내용 1부.

2. 공사비증감 세부내역 1부.

3. 감리단 실정보고서 1부.

4. 실정보고 관련 설계내역서 1부.  끝.