문서번호	급수운영과-5927
결재일자	2023. 4. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김종섭		양봉우	04/11
			이규희
협조

소방용수시설 정비계획(변경) 보고

2023. 4. 11.(화)

강동수도사업소

(급수운영과)

소방용수시설 정비계획(변경) 보고

송파소방서에서 우리사업소에 정비요청한 고장 소방용수시설에 대해 현장조사를 실시하고 다음과 같이 정비계획을 보고함.

□ 관련근거

ㅇ「소방용수시설 정비계획 보고」(급수운영과-5886호,2023.4.11.)

ㅇ「고장 소방용수시설 보수 요청」: 소방용수시설 보수 대상 123개소

(송파소방서 재난관리과-2188호, 2023.3.21.)

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2022년 송파구 관내 상수도 시설물 정비공사

ㅇ 공사개요 : *****************

ㅇ 계약금액 :**************

ㅇ 공사기간 : 2022. 6. 7. ~ 2023. 6. 30.

ㅇ 계약업체 : **************

□ 변경내용

ㅇ 연번10 맨홀 철개 교체 건은 당초 (주)강유건설에 작업지시 예정이었으나 시도상 맨홀에 대해 동부도로사업소에서 관리청 정비시행 요청으로 동부도로사업소로 이관하여 공사 시행 필요

ㅇ 밸브교체 사항에 대해 노후된 지하식 소화전 정비내용 누락으로 지하식 소화전 정비를 포함하여 공사시행 필요

ㅇ 작업지시 변경사항

연번	위치	소화전ID	소방서 지적사항 (추가 확인사항)	당초 지시사항	변경 지시사항
*	******** *****	********	******	*****	**********
*	****************	********	****************	*****	**********
*	*****************	********	***************************	**********	**********
*	********** *****	********	**********	*****	**********
*	*********** *****	********	**************	*****	**********
*	***************	********	***************************	**********	**********
*	***************	********	*************************	**********	**********
*	******* *****	********	***************	****	**********
*	***************	********	***********	**********	**********
**	******** *****	********	*********	********	*************
**	****************	********	******************	**********	**********
**	********* *****	********	*********	**********	**********
**	********* *****	********	*******	*****	**********

□ 조치계획

ㅇ 연번10 맨홀 철개 교체 건은 동부도로사업소에 정비요청하고,

ㅇ 기타 12건에 대해서는 변경 지시사항으로 송파구 관내 상수도 시설물 정비공사 계약업체인 **************에게 작업지시하여 시행하고 추후 설계변경 및 정산시행하고자 함.

ㅇ 더불어 본 공사의 건설사업관리용역 계약업체인*******************에게 감독업무를 시행토록 하여 공사의 철저한 시공 및 안전관리로 시설물 정비 업무에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 현장조사서 13부.

2. 작업지시서(변경) 1부.  끝.