문서번호	건축부-5949
결재일자	2023. 4. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
김동석		왕승찬	04/11
			이형재
협조
	주무관		박지원

『서울 어울림체육센터 건립공사』

건설사업관리용역 계약변경 검토 보고(총차, 2차)

2023.  4. 11. (화)

도시기반시설본부

(시설국 건축부)

『서울 어울림체육센터 건립공사』

건설사업관리용역 계약변경 검토 보고(총차, 2차)

『서울 어울림체육센터 건립공사 건설사업관리용역』의 건설사업관리 기술자 배치에 대한 변경사항이 발생하여 계약변경을 검토 보고 드림

Ⅰ		용역 개요

ㅇ 용 역 명: 서울 어울림체육센터 건립공사 건설사업관리용역

ㅇ 위    치: 서울특별시 노원구 상계동 1268

ㅇ 규    모: 지하 2층 / 지상 3층, 연면적 14,779.98㎡

(수영장 10레인, 볼링장 32레인, 다목적 체육관 등)

ㅇ 계약금액: 금 3,483,530천원 (2차: 금 713,000천원)

ㅇ 계약기간: '20. 3. 10.~'25. 7. 1. (1,940일)

(2차: '21. 2. 3.~'23. 4. 20.)

ㅇ 건설사업관리용역사: ㈜토문엔지니어링 건축사사무소 외 2개사

ㅇ 공 정 율: 15.5%

Ⅱ		추진 경위

ㅇ '19. 12. ~ 21. 5.   설계용역 실시

ㅇ '20. 3. 10.          건설사업관리용역(설계단계) 착수

ㅇ '21. 2.  2.          건설사업관리용역(1차수) 준공

ㅇ '21. 2.  3.          건설사업관리용역(2차수) 착수

ㅇ '22. 7. 25.          건설사업관리용역(2차수) 변경 계약

- 시공단계 추가로 계약기간 및 계약금액 증가

Ⅲ		계약변경 내용

□ 관련문서 및 규정

ㅇ『건설사업관리용역 변경계약 요청의 건』토문 제2303-507호(2023. 4. 11.)

ㅇ『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』제9장 계약 일반조건 제7절(계약금액의 조정)

□ 계약변경 내용

*******************

*****************************************

***********************************************

************

**		****	****	***	**
**	**	**********************	**********************	****
	**	**************	**************	****
**	**	**********************	**********************	****
	**	************	************	**************

ㅇ 예산과목: 도시기반시설본부 건축부, 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간 확충, 서울 어울림체육센터 건립, 시설비및부대비, 감리비 (예산편성부서 : 관광체육국 체육정책과)

Ⅳ		처리의견

*************************************************

**********************************

붙임: 건설사업관리용역 2차 연장 변경계약 요청 1부.  끝.