아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	용역 변경계약 체결 통보(2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사 교통소통대책 수립 용역)

급수운영과-6386(2023. 4. 11.)호 용역계약 변경 의뢰에 따라 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 알려드립니다.

1. 계 약 건 명: 2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사 교통소통대책 수립 용역(담당: 최형진)

2. 계 약 상 대: *********************

3. 변경계약일: 2023. 4. 12.

4. 변 경 내 역

구분	계약 변경 정보		증감/비고
	당초	변경
총부기계약금액	***********	***********	****
금차계약금액	***********	***********	****
기 간 변 경	**************	***************	******

5. 변 경 사 유: 교통소통대책 자문회의 개최결과 미통보에 따른 용역 수행기간 연기

6. 보증서 등 추가 수납: 계약보증금 지급각서 변경

붙임: 1. 용역 변경 계약서 1부

2. 계약 체결 서류 각 1부.

3. 기한변경 의뢰 공문 1부.  끝.

	행 정 지 원 과 장
주무관	민은영		행정관리팀장	강정환		행정지원과장	04/12
代강정환
협조자
시행	행정지원과-8678	(	2023. 4. 12.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 행정지원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3551	/전송	02-3146-3578	/	2014020344@seoul.go.kr	/	부분공개(5)