문서번호	보행자전거과-5441
결재일자	2023. 4. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	자전거도로팀장	보행자전거과장
박지훈	이덕배	04/13
		이선희

자전거 보조간선도로망 구축을 위한 기본 및 실시설계 용역 계약변경 계획

『자전거 보조간선도로망 구축(상암•잠실)』

기본 및 실시설계 용역 계약변경 계획 보고

2023.  4.

도 시 교 통 실

(보행자전거과)

『자전거 보조간선도로망 구축(상암•잠실)』

기본 및 실시설계 용역 계약변경 계획 보고

자전거도로 구축을 위한 경찰청 교통안전심의위원회 심의 상정 등 관계부서 협의의견에 따른 절차 진행에 따라 시간이 소요되어 과업기간을 연장하여 내실 있는 결과물을 만들고자 보고드림

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명 : 자전거 보조간선도로망 구축(상암·잠실)을 위한 기본 및 실시설계 용역

ㅇ 용역기간 : ’22. 5. 24. ~ ’23. 4. 17.

ㅇ 용 역 비 : 229,250천원(부가세 포함)

ㅇ 수행기관 : (주)KG엔지니어링종합건축사사무소, (주)문창

ㅇ 주요과업

- 자전거 보조간선도로망 현황분석 및 계획

- 자전거 보조간선도로 기본설계

- 자전거 보조간선도로 실시설계

**********

****************************************

***************************************

****************************************

**********************************************************

**********************************

**************************************

□ 변경 내용

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	*******************	******************	********
계약금액	*********	*********	****

ㅇ 변경사유 : ***********************************************************************

ㅇ 귀책사유 : 없음

ㅇ 지체상금 : 미부과

□ 향후 일정

ㅇ 변경계약 의뢰(재무과)	: ’23. 4. 14.

ㅇ 경찰청 규제심의	: ’23. 5.

ㅇ 최종보고	: ’23. 6.

ㅇ 용역준공	: ’23. 7.

붙   임   1. 계약변경 및 용역기간 조정 요청(용역사) 공문 1부.
2. 합의각서 1부.

3. 관계부서 협의의견 1부.  끝.