아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		강서도로사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	(스마트 ITS 2.0 구축사업 2차)교통안전시설 원인자부담공사 공기연장 승인 통보

1. 관련근거

가. 강서도로사업소 기전과-2739호(2023.03.22.)

나. 서울특별시 미래첨단교통과-5259호(2023.04.14.)

2. 위 호와 관련하여 공사기간 연장 및 물량변경에 대하여 다음과 같이 알려드립니다.

가. 공 사 명 : 서울시 스마트 ITS  2.0 구축사업(2차)

나. 원 인 자 : 서울시 미래첨단교통과

다. 공사장소 : 강서도로사업소 관내 제어기 교체 위치

라. 공사내용 : 제어기 교체

마. 공사기간 연장내용

구 분	승인 전	승인 후	비 고
********************	*************** *************	*************** *************	*****

- 공기연장사유 : 신호연계장치 성능 통합시험을 위한 공기연장

바. 물량 변경 내용

- ***********************************************************************************  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장), 서 울 특 별 시 장(미래첨단교통과장)
주무관	박준규		기전과장	04/17
김병용
협조자
시행	기전과-3713	(	2023. 4. 17.	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 기전과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	jkp1209@seoul.go.kr	/	부분공개(5)