문서번호	전시과-1087
결재일자	2023. 4. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	전시과장	학예연구부장	서울역사박물관장
이은혁	김양균	박현욱	04/18
			김용석
협 조
	경영지원부장		장화영
	총무과장		김춘섭
	교육대외협력과장		이진현
	유물관리과장		홍승주
	보존과학과장		박상빈

헝가리 국립민족학박물관 국제교류전

‘서울의 멋’ 전시 계획(안)

2023. 4.

서 울 역 사 박 물 관

전 시 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

헝가리 국립민족학박물관 국제교류전

‘서울의 멋’ 전시 계획(안)

한국-헝가리 두 나라의 상호 이해와 우호 증진, 문화 교류를 위하여 헝가리 수도 부다페스트에서 매력도시 서울의 역사와 문화를 소개하며 서울에 대한 관심을 유도하고 서울의 위상을 널리 알리고자 함.

1. 추 진 배 경

□ k-culture에 관심이 높은 헝가리와의 교류 협력 증진

□ k-culture의 중심인 서울의 문화를 헝가리 부다페스트 시민에게 소개

□ 2022년 6월 헝가리 국립민족학박물관 국제교류전의 답방 전시

2. 추 진 방 향

□ 전통과 현대를 아우르는 서울의 멋과 아름다움을 소개

□ 박물관 소장품 중심으로 전통미를 보여주는 한복 및 공예 유물과 함께 새로운 해석이 가미된 현대 작가들의 작품을 전시

□ 헝가리 국립민족박물관과의 상호 호혜적 업무 분장을 통한 효율적 업무 추진

○ 서울역사박물관 : 기본설계, 전시 시나리오 및 원고 작성, 유물 운송 및 보험, 전시 포스터 및 영상 등 콘텐츠 제작, 영상 및 이미지 저작권 및 사용권 제공, 공무 출장 등

○ 헝가리 국립민족학박물관: 실시설계, 전시원고번역, 전시공사, 그래픽 디자인 및 제작, 홍보물 제작 및 배포, 개막식 개최, 전시 운영, 외빈 의전 등

※ 업무 배분 사항은 협약에 따라 달라질 수 있음.

작 성 자	학예연구부장 : 박현욱 ☎724-0138 전시과장 : 김양균 ☎0145 담당자 : 이은혁 ☎0154

3. 전 시 개 요

□ 전 시 명 : 서울의 멋 – Rhythm of Seoul (가제)

□ 전시기간 : `23. 10. 13.(금)~`24. 2. 18.(일) / (예정)

※ 개막식 : 10. 13(금)

□ 전시장소 : 헝가리 국립민족학박물관 기획전시실(640㎡)

□ 공동주최 : 서울역사박물관, 헝가리 국립민족학박물관

□ 전시내용

◎ 전통과 현대가 공존하는 수도 서울의 역사성·문화성·장소성을 생생하게 전시

◎ 의·주생활을 중심으로 서울의 전통적 멋을 선보이고, 전통의 현대적 계승을 소개

□ 소요예산 : 359,000천원

< 헝가리 국립민족학박물관 개요 >

• 위  치 : 부다페스트 도시공원 내(면적 33,000㎡)

• 재개관 : 2022. 5. 23.

-개관 150년의 역사를 가진 헝가리 대표 민족 박물관

-현재 진행중인 유럽 최대 규모의 도시문화 개발 프로젝트(Liget Budapest Project)의 주요 랜드마크로, 도시와 공원을 연결하는 관문이자 출입문 기능 수행

-IPA 세계 최고의 건축물 등 다수 건축상 수상

박물관 전경

기획전시실 내부	기획전시실 벽체(W7080, H3000, D830)

4. 세부추진계획

□ 전시 구성(안)

구 분	주 제	주요자료 및 연출
프롤로그	고요하게 찾아든 찬란한 서울	-세계지도 -동여도(부분/복제)
1부 일상의 멋_衣	하얀 도시 서울(일상복)	-백색 도포, 저고리, 바지 -흰색 천을 천장에 달아 흰색 분위기 극대화
	찬란함을 입다 (예복, 관복)	-남성: 조복 일괄 -여성: 적의, 당의, 치마 -마네킹(저고리, 스란치마) -단령, 흉배, 사모, 목화, 각대
	멋에 쓸모를 더하다 (모자, 장신구)	-남성: 갓, 전립, 관모 등 -여성: 조바위, 남바위, 아얌 -남성: 상투관, 망건, 동곳, 풍잠, 관자, 부채, 장신구 -여성: 첩지, 비녀, 뒤꽂이, 떨잠, 댕기, 노리개
	멋이 새로이 흐르다 (전통 복식의 재해석)	-까치두루마기, 복건, 풍차바지, 아기태사혜, 타래버선 -(재해석) 타래버선 착인 신발, 철릭원피스 ,생활한복(한복진흥재단 대여) 및 관련 패션쇼 영상 등 -고궁한복관람문화
2부 일상의 반경_主	정성의 공간, 규방	-실패, 받짇고리, 자개자, 실첩 -골무, 바늘방석, 눌림쇠보, 가락지보 -귀주머니, 두루주머니, 줏주머니, 수저주머니 -(재해석)스카프, 귀주머니 핸드백 등
	사색의 공간, 사랑방	※ 사랑방 연출 -솟을대문 빔영상, 문밖 사계 영상 -사방탁자, 문갑, 서안, 방석, 고비 -책가도병풍 연출(그래픽)
에필로그 서울을 보는 창	전통과 현대가 공존하는 서울의 모습 소개 서울역사박물관 소개	-현대 서울의 사진 및 영상(북촌, 경복궁 등) -서울역사박물관 홍보영상

※ 전시구성안은 전시설계, 협약에 따라 달라질 수 있음

□ 전시설계 및 전시물 제작·설치 용역

◎ 사 업 명 : 헝가리 국제교류전 전시설계 및 전시물 제작 설치 용역

◎ 사업내용 :  전시설계, 연출기획, 전시그래픽․영상․모형 등 전시물 제작․설치, 유물복제, 텍스트 번역, 유물운송 및 보험, 전시물(장비포함) 대여 및 설치 등

◎ 사업기간 : 계약일로부터 ~ 24.03.31

◎ 사업예산 : 320,000천원

◎ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

· 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제43조 제1항 및 제44조

※ 협상에 의한 계약 사유 : 전문성 확보

ｏ 박물관 전시는 전문성과 모형․작동장치․영상 등 창의적 물품제작이 큰 비중을

차지하는 대중적 작품이므로 설계자의 의도구현이 관건임

ｏ 구체적인 제안서 및 설계도면․내역서 등을 통해 전시업체를 선정함으로써 가격

경쟁력보다 전시의 질적인 내용을 우선시하여 평가할 수 있음

ｏ 제안서 평가위원회의 결과에도 불구하고 우선협상순위 업체 및 이하순위 업체와 협상

절차를 통해 박물관과 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약할 수 있음

· 선정 절차

구매규격 사전공고 (5일)	⇨	입찰 공고 (20일)	⇨	질의 답변	⇨	입찰등록 및 제안서접수	⇨	제안서 평가	⇨	협상대상자 선정 및 통보	⇨	협상 및 계약체결

□ 전시준비

◎ 전시준비단 파견

· 전시설치 : 전시유물 호송 및 해포, 전시물 설치(2인)

· 전시철거 : 전시물 철거 및 포장, 전시유물 반환(2인)

◎ 박물관 대표단 파견 : 전시개막식(10월 13일 예정) 참석(2인)

※ 국외출장은 별도 계획 수립

5. 예산집행계획

□ 소요예산 : 359,000천원

□ 예산과목

◎ 역사와 문화의 복합공간 창조, 박물관 활성화, 박물관 기획전, 일반운영비,

사무관리비․공공운영비·국외업무여비·시설비·행사관련시설비

소요예산	예산액 (천원)	상세내역
통계목
사무관리비 (100-201-01)	225,500	◦ 전시 그래픽 디자인 ◦ 영상 등 전시물 제작 ◦ 전시 원고 번역, 통역 ◦ 유물 운송 ◦ 사무기타 운영비(자문수당 등)
공공운영비 (100-201-02)	2,500	◦ 유물보험
국외업무여비 (100-202-03)	18,000	◦ 유물 설치 인원 ◦ 개막식 대표단
시설비 (100-401-01)	13,000	◦ 전시연출관련 기본설계
행사관련시설비 (100-401-04)	100,000	◦ 전시물(모형 등) 제작(장비포함)·설치
총 계	359,000
※ 세부 예산내역 및 집행방법은 업무 추진 상황에 따라 변경될 수 있음 ※ 유물 철수 인원 비용(국외업무여비)은 ’24년 예산 계상 필요 ※ 전시종료(‘24년 2월) 될 경우 사무관리비 중 계약업체의 유물 철수 비용은 사고이월

□ 예산집행방법

◎ 전시설계 및 전시물 제작 설치 : 협상에 의한 계약

· 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제43조 제1항 및 제44조

◎ 기타운영비 : 제안서 평가수당 등 일반지출 및 일상경비로 교부받아 집행

6. 예산집행계획

추진일정	추진내용
’23. 4.~5.	전시협약서 체결, 구매규격 사전공개, 입찰공고(40일) 업체선정 및 계약, 국내 유물 대여 협의, 전시 유물 확정
’23. 6.~7.	전시연출 관련 기본설계 및 설계(안) 헝가리 민족학 박물관 검토, 전시원고 작성, 전시 콘텐츠 제작(영상, 모형 등), 문화재청 유물 국외반출허가, 그래픽 작업
‘23. 8.~9.	전시원고 교정, 유물보험가입, 전시공사
’23. 10.	유물·전시물 운송 및 거치, 보도자료 작성 및 배포
’23. 10.13	전시개막
’23. 10. ~ ‘24. 2.	전시운영
‘24. 2.~3.	전시물 철거 및 반입 운송, 결과보고

7. 협 조 사 항

□ 총    무    과 : 예산 및 행정 사항 지원

□ 교육대외협력과 : 전시협약 체결 및 언론홍보 지원

□ 유 물 관 리 과 : 전시유물실사, 전시관련 사진자료 제공,

유물 촬영, 해외 운송대상 유물 수장고 보관

□ 보 존 과 학 과 : 해외 운송 시 유물 상태 점검 등 환경관리

□ 도시유적전시과 : 한옥 모형(금부동집, 수동집), 사랑방 연출품

(사방탁자, 문갑, 촛대, 서안 등) 대여

<첨 부>

전 시 장 소

헝가리 국립민족학박물관 기획전시실 평면도