아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국토지주택공사사장
(경유)
제목	물가변동에 의한 사업비 조정 사전협의(위례선 트램 차량구매)

1. 조달청 자재장비과-1236('23.02.27.)호 및 서울특별시 도시철도설비부-3724('23.04.14.)호와 관련입니다.

2.「위례선(트램) 도시철도 건설사업」관련 트램 차량제작사의 물가변동에 의한 계약금액 조정 요청 및 조달청의 원가계산 용역기관 검토보고서 요청에 따라 우리 본부는 원가계산 전문기관을 통해 계약금액 조정 검증용역을 실시하였으며 검증용역 결과 아래와 같이 사업비를 조정하고자 하오니 귀 공사의 의견을 회신하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

가. 건    명 : 물가변동에 의한 사업비 조정 사전협의(위례선 트램 차량구매)

나. 사업비 조정 요청액 : *******************

(단위 : 원)

구 분	기존 사업비	변경 사업비	증 액	변경 사유
차량구입비 (차량+조달수수료+관련 용역)	**************	**************	*************	물가변동 조정 (1회, 2회)

< 위례선 트램 차량구매 물가변동 계약금액 조정액(1회, 2회) >

(단위 : 원)

계 약 명	기존 계약액	물가변동 조정액	변경 계약액
위례선 트램 차량구매	**************	*************	**************
조달수수료	***********	*********	***********
계	**************	*************	**************

※ 조달수수료는 변경계약 시 할인률 등에 따라 변경될 수 있음

붙임 1. 물가변동 계약금액 조정 검토 보고 1부.

2. 원가계산 용역기관 검토보고서 보완요청(조달청→본부) 공문 1부.

3. 물가변동 조정 요청서(차량제작사→본부, 용량초과로 별도 송부) 1부.

4. 물가변동 조정 검증용역 결과보고서(용량초과로 별도 송부) 1부.

5. 조달수수료 계산(변경계약 시) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이은석		차량과장	배광희		도시철도설비부장	04/19
전계목
협조자	주무관	장영석		위례선과장	김상용
시행	도시철도설비부-3914	(	2023. 4. 19.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6438-2732	/전송	02-6438-2799	/	les0115@seoul.go.kr	/	부분공개(7)