문서번호	기전과-5018
결재일자	2023. 4. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이석희		김문수	04/19
			김은덕
협조

원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「문정 동남로 가로조성 관련 교통신호등 설치공사」

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

「문정 동남로 가로조성 관련 교통신호등 설치공사」

2023. 4. 19.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

문정 동남로 가로조성 관련 교통신호등 설치공사 관련 원인자부담 공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 변경승인 통보 4차

ㅇ 동부도로사업소 기전과-33046호(2022.12.29.)

□ 원인자부담공사 준공승인 요청

ㅇ ********************************

□ 원인자부담공사 준공검사 입회 요청

ㅇ 동부도로사업소 기전과-975호(2023.02.22.)

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 문정 동남로 가로조성 관련 교통신호등 설치공사

□ 공사위치 : 송파구 문정동 150-14

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******** *****	******	********	*************

Ⅲ		추진 경위

□ '18.08.28. : 원인자부담공사 승인 요청

□ '18.08.31. : 공사 승인

□ '18.12.24. : 원인자부담공사 변경승인 요청 1차

□ '18.12.26. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : *************************************

□ '19.08.01. : 원인자부담공사 변경승인 요청 2차

□ '19.10.15. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : *************************************

□ '20.06.05. : 원인자부담공사 변경승인 요청 3차

□ '20.07.28. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : *************************************

□ '22.12.28. : 원인자부담공사 변경승인 요청 4차

□ '22.12.29. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : *************************************

□ '23.02.21. : 원인자부담공사 준공승인 요청

□ '23.02.27. : 준공검사 시행

Ⅳ		준공검사 및 지적사항 조치

□ 검사결과

ㅇ 점검일시 : 2023.02.27.(월) 15:00 ~

ㅇ 입 회 자 : ******************************************************************************

ㅇ 지적사항 : 신호제어기 파손, 함체접지 미흡, 신호지주 점검구 미흡, 맨홀 단차 조정 미흡

□ 조치결과

ㅇ 확인일시 : 2023.04.05.(수) 13:00 ~

ㅇ 확 인 자 : ***************

ㅇ 확인결과 : 지적사항 조치완료(붙임7)

Ⅴ		준공승인 및 검토사항

□ 준공승인 내역

구 분	공 사 내 역			비 고
	품 명	규 격	수 량
신 호	신호제어기	표준형	3대	이 설
	차량신호등	1면3,4색	6조	신 설
			23조	이 설
	보행신호등	1면3색	24조	신 설
			17조	이 설
	디자인지주	∅350mm X 8m	6본	이 설
		∅250mm X 8m	10본	이 설
		∅125mm X 4m	8본	이 설
	신호맨홀	800mm*800mm*800mm	22식	신 설

□ 검토사항

구 분	검 토 사 항	결 과	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적 정
	교통안전시설 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적 정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적 정

시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적 정
	차량 및 보행등 정상 작동 상태 확인	적 정
	차량 및 보행등 지주 설치(수평) 상태 확인	적 정

Ⅵ		검토 의견

□ 본 공사는 설치 후 시간이 오래 경과한 시설물로 한국전기 안전공사 전기설비 안전진단 재실시 후 준공검사 실행하였음

□ 준공서류를 검토한 결과 적정하므로 준공승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 제출 서류(별첨, 용량초과) 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 준공내역서 1부.

4. 준공도면 1부.

5. 준공감리조서 및 준공검사조서 1부.

6. 기타사항 점검결과 1부.

7. 지적사항 조치결과 1부.  끝.