아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	공사진도율 지연에 따른 만회대책 수립 지시(서울 어울림체육센터 건립공사)

1. 귀 사(현장)의 무궁한 발전과 안전을 기원합니다.

2. 귀 사께서 시공(용역)하고 있는『서울 어울림체육센터 건립공사』를 추진함에 있어 *********************************** 알려드리오니

3. 건설공사 업무수행지침에 따라 건설사업관리기술인은 시공자로부터 부진사유 분석, 근로자 안전확보를 고려한 부진공정 만회대책 및 만회공정표를 수립하도록 지시하여 제출받고, 제출된 부진공정 만회대책을 검토∙확인하여 그 이행상태를 주간단위로 점검∙평가 등 정상공정을 회복할 수 있도록 즉시 특단의 조치를 시행하시기 바랍니다.

4. 아울러, 공정관리∙안전관리∙품질관리 등 건설사업관리 부실수행으로 인한 행정처분(벌점부과 및 건설사업관리기술인, 현장대리인 교체 등)을 조치 할 예정이오니 건설사업관리 업무 수행에 만전을 기하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	(주)토문엔지니어링 건축사사무소 대표 이을재 귀하, (주)코원건설 대표 이규식 귀하, 엘앤케이경원건설(주) 대표 이봉하 귀하, 서울 어울림체육센터건립공사 책임건설사업관리기술인 허정욱 귀하, 서울 어울림체육센터 건립공사 현장대리인 장동규 귀하
주무관	김동석		문화시설과장	왕승찬		건축부장	전결 04/19
이형재
협조자
시행	건축부-6373	(	2023. 4. 19.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 13층 (무교동, 프리미어플레이스)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6438-2232	/전송	02-6438-2299	/	kds47@seoul.go.kr	/	부분공개(5)