문서번호	시설관리과-7179
결재일자	2023. 4. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
조영범		양창진	04/19
			유명은
협조

설계변경 검토 보고

[2022년 아리수올림터 등 모터펌프 수리(장기계속단가계약)]

2023. 4.

강서수도사업소

(시설관리과)

설계변경 검토 보고

[2022년 아리수올림터 등 모터펌프 수리(장기계속단가계약)]

현재 시행중인 「2022년 아리수올림터 등 모터펌프 수리(장기계속단가계약)」관련 노후 설비 정비에 따른 물량 증·감 및 신규 공종 등 추가사항이 발생하여 설계변경 검토결과를 보고 드림

□ 추진근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액의 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 114호, '20.6.10)

- 제13장 공사계약 일반조건 제6절, 15장 물품계약 일반조건 6절

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2022년 아리수올림터 등 모터펌프 수리(장기계속단가계약)

○ 계약업체 : 하지공업(주) (대표 : 이권화)

○ 계약기간 및 금액

구분	계약기간	계약금액	비고
총차	'22. 5. 12. ~ '22. 4. 30.	48,400,000
1차	'22. 5. 12. ~ '22.12. 31.	26,283,400	'22.12월 기성처리
2차	'23. 1. 1. ~ '23. 4. 30.	22,116,600

○ 사업대상

- 모터펌프 250HP×1대, 10HP×1대, 5HP×1대 수리

- 기타 부대시설 수리 1식

□ 설계변경 내역

○ 설계변경 사유

- 기계설비 유지보수에 따른 신규공종 및 시공물량 증·감 발생

- 목동배수지 유출밸브실 배수펌프 교체 및 배관교체, 배류기 철거등 신규    공종 및 물량변동 발생

○ 설계변경 금액(정산포함)

구분	변경전 금액	변경후 금액	증·감	비고
총차금액	48,400,000	51,220,400	(증)2,820,400
1차수 금액(2022년)	26,283,400	26,283,400	-
2차수 금액(2023년)	22,116,600	24,937,000	(증)2,820,400	제경비 포함 정산

○ 예산과목 : 영업비용, 배급수비, 아리수올림터배수지등기전설비유지관리,                 수선유지교체비(수선유지비)

□ 행정사항

○ 상기와 같이 신규공종 및 계약물량 증·감 등에 대해서는 향후 설계변경 심의위원회를 개최하여 사전 심의후 설계변경 및 정산코자 함.

붙임 : 설계변경 내역서(2차수) 및 합의서 각 1부.  끝.