아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약변경 요청(마을마당 경계담장 축조공사 감리용역)

「마을마당 경계담장 축조공사 감리용역」계약건에 대하여 아래와 같이 계약변경을 요청합니다.

가. 계 약 명 : 마을마당 경계담장 축조공사 감리용역

나. 계약일자 : 2022.11.25.

다. 계약기간 : 2022.11.25. ~ 2023. 5. 4.

라. 계 약 자 : *********************

마. 계약변경 사항

구분	변경전	변경후	비고
용역기간	2022.11.25. ~ 2023. 3. 4.	2022.11.25. ~ 2023. 6.14.

바. 변경사유 : 공사 착공지연에 따른 감리 착수 지연

붙임 1. 마을마당 경계담장 축조공사 감리용역 준공기한 변경계획 1부.

2. 용역계약서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	문 화 정 책 과 장
주무관	이재익		문화공간운영팀장	빈재석		문화정책과장	04/19
전재명
협조자
시행	문화정책과-5821	(	2023. 4. 19.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 세종대로 124, 한국프레스센터 4층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2533	/전송	02-2133-1059	/	ad2500@seoul.go.kr	/	부분공개(7)