아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(팬코일유닛) 납품기한 연장 의뢰[로봇과학관 건립 기계설비공사]

우리 본부에서 추진 중인 「로봇과학관 건립 기계설비공사」에 소요되는 관급자재(팬코일유닛)에 대하여 아래와 같이 납품기한 연장을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 연장내용

계약번호 (납품요구번호)	계약건명	계약자	차수	계약금액(원)	준공(납품기한)
					당초	변경
00-17-8-0319-09 (12-22-2-65411-00)	팬코일유닛	㈜신우공조	총차	**********	2023.04.09.	2023.10.21.

※ 연기 사유 : 선행공종(건축) 준공기한 연장에 따른 후속공종 관급자재 납품기한 연장

2. 계약금액 : 변동없음

3. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 관급자재 납품기한 연장 검토보고  1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	설 비 부 장
주무관	김세익		도로설비과장	곽용길		설비부장	04/20
代장병선
협조자
시행	설비부-5969	(	2023. 4. 20.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어 플레이스빌딩 15F	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-8639	/전송	02-3708-8659	/	openland88@seoul.go.kr	/	부분공개(6)