문서번호	인재기획과-4637
결재일자	2023. 4. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	인재기획과장
이명희		최진경	04/20
			김규룡
협조

2023년 인재개발원 산사태정비공사 실정보고(1차)

2023. 2.

서울시인재개발원

(인 재 기 획 과)

2023년 인재개발원 산사태정비공사 실정보고(1차)

『2023년 인재개발원 산사태정비공사』 추진과 관련하여 현장여건 및 자재 수급이 어려움 등 시공감리 중간보고가 있어, 실정 검토보고 함

Ⅰ

공 사 개 요

❍ 위    치 : 서울시 서초구 서초동 산36-6번지 일대(우면산)

❍ 공사기간 : 2022. 3. 16 ~ 6. 13(90일간)

❍ 공사개요 : 사방댐 및 골막이, 바닥막이, 기슭맑이 등 사방시설 설치

❍ 도 급 비 : 금302,856,230원

❍ 도급업체 : 주식회사 로안포레스트 대표 김승진(송파구 송파대로28길 24)

❍ 시공감리 업체 : 주식회사 백림FR 대표 송동근(경기도 광주시 행정타운로 69번길 18)

❍ 공 정 률 : 약 15%

Ⅱ

그간 추진사항

❍ 2022. 09. 30 : 2023년 인재개발원 산사태 정비사업 추진계획 수립

❍ 2022. 12. 20 : 정비공사 실시설계 및 서울시(시 산지방재과) 심의

❍ 2023. 01. 15 : 2023년 예산 재배정(시 산지방재과 → 인재개발원)

❍ 2023. 02. 10 : 공사발주

❍ 2023. 03. 02 : 공사계약 및 현장 시공분석

❍ 2023. 03. 10 : 관급자재(레미콘, 휀스) 조달구매 의뢰

※ 주요 관급자재 조경석은 당초 실시설계 시 선정한 조달업체 영업중지 및          서초구 납품 가능 타업체 선정에 어려움이 있어, 납품가능 업체 재조사중

❍ 2023. 03. 15 : 정비공사 시공감리 계약

❍ 2023. 03. 16 : 도급자 안전관리계획서·위험성평가계획서 제출 및                           공사착공

❍ 2023. 04. 19 : 작업로 및 철거, 기초터파기 공종 완료

Ⅲ

현장실정 중간감리 보고개요

❍ 공정률

- 공사예정기간 90일중 4월 19일 현재(35일/38.8% 경과) 레미콘 및 큰돌            (조경석) 등 관급자재 조달에 어려움으로 작업공정률이 15%로 저조함

- 관급자재 조달에 어려움으로 인한 공사지연시 우기전 사방시설               정비공사의 완료가 어려워 사급자재 변경 등에 대한 검토가 필요함

❍ 현장여건에 따른 설계변경 사항

- 수급이 어려운 관급자재의 사급자재 등 변경 검토 필요

- 대상지 상부에 설치되는 사방댐에서 하부 기존 깬돌 기슭막이 구간내           큰돌기슭막이 연장설치 필요

- 기존시설 철거구간내 깬돌기슭막이 뒤채움이 콘크리트로 되어있어           폐콘크리트 물량증가에 따른 폐기물 처리 증량 필요

- 작업로 개설시 벌목된 임목 수량이 증가되어 벌목 및 임목폐기물             처리 필요

Ⅳ

검 토 의 견

❍ 관급자재 사급자재 변경 검토

- 관급자재 문의결과, 사방댐 구조물에 한하여 필요한 레미콘은 조달계약된           납품업체의 현 확보된 공급물량 부족으로 인해 5월중 납품가능          의견을 회신하였으며,

- 큰돌(조경석)은 현장여건 및 공급 가능 규격 등을 재검토하여 관급              또는 사급자재를 재선정 발주코자 함

❍ 현장여건에 따른 시공물량 증가 등 검토

- 조경석은 시공대상의 품질이 확보되는 범위네 공급이 원할한 물품            규격 등을 재선정 설계변경하여 시공하고,

- 대상지 상부 기슭막이 연장 및 기존 배수로 철거시 발생되는 폐기           물량 증가분은 본공사의 현장여건 등을 감안 설계변경 추진하되,

- 설계변경을 시공 전에 완료해야 하나, 관급자재 납품 가능 시기 및            교육과정 운영상 소음 발생 최소화 등을 고려하며 우기전 공사 완공될 수          있도록 현장여건에 맞게 우선 시공하고 추후 설계변경 시행코자 함.

Ⅴ

예산집행 계획

❍ 예산조치 : 금회 설계변경으로 인한 부족예산은 본 사업의 집행잔액 활용

❍ 예산과목 : 인재개발원 인재기획과, 산림안전관리, 산림재해방지,

사방시설 조성(국비), 시설비 및 부대비, 시설비(재배정)

붙임 : 2023년 인재개발원 산사태 정비공사 중간감리보고서(2차) 1부.  끝.