문서번호	시설관리과-7275
결재일자	2023. 4. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
조영범	양창진	유명은		04/20
				신정철
협 조

『2022년 아리수올림터 등 모터펌프 수리(장기2차)』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2023. 04.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『2022년 아리수올림터 등 모터펌프 수리(장기2차)』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

『2022년 아리수올림터 등 모터펌프 수리(장기계속단가계약)』에 대한 설계변경(2차) 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ	사업개요

○ 사 업 명 : 2022년 아리수올림터 등 모터펌프 수리(장기계속단가계약)

○ 계약상대 : *****************

○ 계약기간 : 2022. 5. 12. ~ 2023. 4. 30.

- 1차수) 2022. 5. 12. ~ 12. 31. /  2차수) 2023. 1. 1. ~ 4. 30.

○ 계약금액 : ***********************

***************************************

○ 사업내용 : 아리수올림터·증압장 모터펌프 수리 및 기타 부대설비 수리

Ⅱ	설계변경 내역

○ 계약물량 증·감

- 계약물량 증가 : 증압장 모터펌프(15HP)수리 1대, 목동배수지 배수펌프 교체,                        화곡역 배류기 철거

- 계약물량 감소 : 증압장모터펌프(5HP)수리 3대

○ 계약금액 변경내역(제경비 정산 포함)

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증/감	비 고
총 부기금액		**********	**********	************
1차수	‘22년 계약금액	**********	**********	*	'22년 정산
2차수	‘23년 계약금액	**********	**********	************

Ⅲ	설계변경 심의위원회 개최 현황

○ 일    시 : 2023. 4. 20.(목) 14:00

○ 장    소 : 사업소 4층 회의실

○ 안    건 : 설계변경 적정성 심의

○ 심의위원

- 위원장 : 시설관리과장 유명은

- 위  원 : 시설운영팀장 김형식, 시설관리팀장 정수용, 기전팀장 양창진

- 간  사 : 공업 6급 조영범

○ 주요 심의내용

- 계약물량 및 계약금액 변동 타당성, 제경비 산정 적정성 여부

Ⅳ	심의결과

○ 계약금액 변동 및 제경비 산정 등 적정함

Ⅴ	행정사항

○ 설계변경 심의결과에 따라 설계변경 시행 및 변경계약 체결

붙임 : 1. 설계변경 심의 결과서 1부
2. 변경내역서 1부
3. 합의서 1부.  끝.