문서번호	급수운영과-7371
결재일자	2023. 4. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수관리팀장		급수운영과장	중부수도사업소장
김종수		代이훈재	04/20
			장청락
협 조
	주무관			성영한

2022년 중부관내 포장도로굴착복구공사 설계변경(제5회, 최종) 계획(안)

2023. 4. 20.(목)

중부수도사업소

(급수운영과)

2022년 중부관내 포장도로굴착복구공사 설계변경(제5회, 최종) 계획(안)

「2022년 중부 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속)』의 시공물량 증감에 따른 설계변경(제5회, 최종)을 통하여 굴착복구공사 업무에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		현 황

□ 추진 근거

○ 공사계약일반조건 제19조 및 서울특별시 공사계약특수조건 제12조(설계변경 등)

○ 2023년 상수도사업 계약심사 추진계획(안전조사과-908호, 2023. 1. 27.)

□ 공사 개요

○ 공 사 명: 2022년 중부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속)

○ 공사내용: *****************************************************

○ 공사기간: 2022. 5. 4. ~ 2023. 6. 30.

○ 계약금액: ********************************

○ 도 급 자: ****************

Ⅱ		설계 변경(안)

□ 공사 물량 증·감 현황 및 증가 사유

○ 물량 증감 현황

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
아 스 팔 트(a)	******	*****	*****
콘 크 리 트(a)	****	****	****
보 도 블 록(a)	*****	*****	*****
아스팔트 표층(a)	******	******	*****

- 물량 증가: ******************************

- 물량 감소: *************************

○ 증가 사유

- 상수도 공사 작업물량 증가에 따른 포장복구 계약 물량 증가

□ 설계 변경 내용

○ 설계금액: **************에 따른 금액 변경                (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	**************	**************	***********	*******
공급가액	**************	**************	***********
부 가 세	************	************	**********

- 단가 적용

▶ 물량 증감에 대한 적용: 계약 당시 단가 적용

▶ 신규 공종 및 자재 적용: ****************** 적용

○ 차수별 변경내역                                                 (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
총부기 계약금액	**************	**************	***********
1차수 계약금액	*************	**************	*	*****
2차수 계약금액	************	**************	***********	*****

Ⅲ		행정 사항

□ 계약금액조정 심사 의뢰(본부 안전조사과)

○ 단가계약(장기계속 포함) 공사는 도급비 증액 시 최종 설계변경만 심사의뢰

○ 설계변경의 적정성 및 신규공종 단가적용, 물량 증감 등 검토

<본청 계약심사과 심사대상>

▶ 계약금액이 20억원 이상 공사의 설계변경에 따른 1회 증액분 또는 2회 이후 누적        증액분이 해당 계약금액의 10퍼센트 이상인 설계변경 공사

▶ 근거: 서울특별시 계약심사 업무처리 규칙(서울특별시규칙 제4461호, 2022. 1. 13)

□ 계약금액조정 검증 완료(시청 기술심사담당관): 적정

□ 계약심사 조정 결과(본부 안전조사과)를 반영하여 설계변경 시행

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부. 끝.