문서번호	공원운영과-6486
결재일자	2023. 4. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		代성민관	04/24
			이인수
협조

「남산청사 노후 소방설비 보강공사」

주간 안전 점검 및 작업 결과보고(4.17~4.20)

2023. 4.

중부공원여가센터

(공원운영과)

「남산청사 노후 소방설비 보강공사」

주간 안전 점검 및 작업 결과보고(4.17~4.20)

남산청사 소방설비 보강공사 관련 안전점검 및 작업결과를 아래와 같이 보고하고자 합니다.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 남산청사 노후 소방설비 보강공사

□ 공사기간 : 2023. 2. 28. ~ 2023. 5. 18.

	< 공 사 내 용 >
펌프 교체공사 (소화전, 스프링클러, 방진가대 등) 1식 소화전 및 스프링클러 배관 교체공사 (밸브, 용접, 보온 등 포함) 1식 배관 도색공사 (배관 및 밸브 등 녹방지 페인트 포함) 1식 부대공사 (수격방지기, 압력탱크 등 교체) 1식 고재처리 (중량철B) 1식

□ 예정공정표

문서서식포탈비즈폼

공 종	3월						4월						5월
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
현장확인 및 자재준비
소방서 착공신고
기존펌프 철거
자재반입(소화펌프)
방진가대 및 펌프설치
펌프실 배관설치 및 보온
시운전 및 잔손보기

Ⅱ		안전점검 결과보고

1		안전 교육 결과 [일일]

□ 교육대상 : 현장소장(대리인) 포함 작업자 전원

□ 교육내용

교 육 내 용
작업별 안전교육(화기,고소,중장비 등)	□화재, 추락, 낙하 등 사고 예방 교육
소방 및 비상대피 교육	□화재 발생 시 초동조치 및 비상 대피로 교육
안전장비 사용 교육	□안전모·안전띠 사용 방법 및 안전 교육

□ 교육결과 : 작업자 전원 일일 안전 교육 참여

2		현장 점검 결과 [일일]

□ 공사 안전점검 결과

구 분	체크리스트	점검결과
화기작업	작업장 주위 화재 물질 제거 여부	*****
	방화포 설치 여부	*****
	소화기 비치 및 소화전 위치 파악 여부	*****
	가스용기 고정 및 체결 여부	*****
고소작업	안전모, 안전대 등 점검장비 상태	*******
	사다리 2인1조 작업 여부	*******
	작업발판, 안전난간 상태	*******
	고소작업장소 출입금지 조치 여부	*******
공통사항	작업자 건강상태	*****
	안전교육 실시 여부	*****
	안전허가서 승인 여부	*****
	안전보호구 착용 여부	*****
	공사관련 장비 및 기기 상태	*****
	현장소장, 현장책임자 입회여부	*****
	공사현장 주변 위험요인 여부	*****

Ⅲ		주간 작업 결과 보고

□ 주간 작업 결과

ㅇ ****************************************

ㅇ **************************

작 업 일 정
2023. 4. 17.	**************************************
2023. 4. 18.	**********************************************
2023. 4. 19.	******************************************
2023. 4. 20.	*****************************************

따로붙임 1. 안전 작업허가서(4.17. ~ 4.20.) 1부.

2. 공사 안전 점검일지(4.17. ~ 4.20.) 각 1부.

3. 교육결과보고서(4.17. ~ 4.20.) 각 1부.