문서번호	급수운영과-6463
결재일자	2023. 4. 24.
공개여부	부분공개(6)

주무관		급수운영팀장		급수운영과장					결재
남상욱		이문성		04/24
				송병욱
협 조

교육일지(서울시설공단 상수도 공사감독 대행사업)

교육대상

북부수도사업소 토목직

교  관

급수운영과 급수운영팀장

교육일시

2023년  4월  19일 17시~18시

교육과목

서울시설공단 상수도 공사감독 대행사업 지도,점검 지적사항 교육

교육

내용

본부 누수대응과 「서울시설공단 상수도 공사감독 대행사업」 지도점검 시

지적사항 잘 숙지하여 올해 동일사례가 발생하지 않도록 할 것

1. 공사감독 위탁사무 지적사항(공단 소관사항)

- 착공신고서 검토보고서 제출 준수 : 7일 이내 착공보고

- 최종 설계변경 제출기한 준수 : 준공 7일(본부심사 14일) 이내 승인의뢰

- 단수승인 절체 제출기한 미준수 :  작업예정일 5일 이내 승인의뢰

- 공정관리 소홀로 인한 공사추진 지연

2. 단위사업 담당업무 지적사항(사업소 소관사항)

- 도로굴착허가, 관급자재 구매 지연 등 공사착공 사전준비 미비로 준공기한 연기

- 공사계약 통보 미시행 : 계약과 동시에 공단에 공사계약 통보

- 단수계획 승인 미조치 : 단수지역,단수시간 적정성 검토 후 승인

- 현장실정보고 검토결과 미통보 : 제출된 실정보고 사항 검토결과 통보요망

- 최종설계변경 승인 요청에 대한 검토결과 미통보 : 7일이내 적정여부 통보

비고

.