아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경(3차)시행에 따른 계약의뢰 (2022년 강남수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사)

우리사업소에서 시행중인『2022년 강남수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사』에 대하여 현장여건 변동에 따른 계약물량 증·감 및 신규공종이 발생함에 따라 아래와 같이 설계변경(1차)시행을 의뢰합니다.

가. 공 사 명: 2022년 강남수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사

나. 계 약 자: **************

다. 계약기간: 2022.06.28 ~ 2023.06.30. (2차수: 2023.1.1.~2023.6.30)

라. 설계변경 금액 : 변동없음

(단위 : 원)

구분		설계변경 금액
		당 초	변 경	증,감
총공사비		*************	*************	**************
도급비	공급가액	*************	*************	**************
	부가세	***********	***********	**************
	계	*************	*************	**************
관 급 비		***********	***********	**************

마. 설계변경 사유: 현장여건 변동에 따른 계약물량 증ㆍ감 발생

공 종	당초	변경	증․감	비고
아스팔트포장	76.39a	******	*******
보도블록포장	12.10a	******	*******
아스팔트표층	81.60a	******	********

바. 하자기간: 준공검사일로부터 2년

사. 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비, 수선유지비

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축, 소방용수시설 등의 설치 및 관리, 일반회계, 소방용수시설(신설) 보수, 시설비

붙임:  1. 설계변경(3차) 심의결과 보고 1부.

2. 설계변경(3차) 심의위원회 의견서 1부.

3. 설계변경(3차) 관련서류 각 1부.

4. 합의서(설계변경-3회) 1부. 끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	장형준		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	04/21
박종일
협조자
시행	급수운영과-6422	(	2023. 4. 21.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4848	/전송	02-3146-4889	/	88501041@seoul.go.kr	/	부분공개(5)