제2자유로 종점부 입체화공사 조경복구계획 변경 실정 보고

공사명

제2자유로 종점부 입체화 공사

공사개요

◦위치: 마포구 상암동 월드컵경기장 사거리 일대

◦규모: 지하차도 신설(폭4차로, 연장 540m),

월드컵로 확장

- 조경: 가로수, 띠녹지, 지하차도 상부 식재 등

◦공사기간: '19.8.1~ '23.04.30

◦도 급 비: 56,069백만원

- 조경: 1,121백만원

※ 공정률: 98.7%(조경 68.3%)

◦시공사 : 삼부토건(주)외 2

◦감리단 : 동부엔지니어링(주)외2

◦설계사 : ㈜유신 외 3

보고 건명

조경복구계획 변경 실정 보고(교통규제심의에 따른 조경계획 변경 등)

보고 배경

◦ 교통규제심의에 따른 변경내용 반영 및 현장여건에 따른 추가 물량 반영 등 조경

복구 계획 변경을 위한 실정 보고

보고요지

****************************

***************************

**************************************************

****************************************************

*************************************

***************************************

********************************

******************************

******************************

*****************************************************

**************************************

****************************

*****************************************

***********************************

*****************************************

*************************************************

**********************************************

***********************************

***************************************

건설사업

관리단

검토의견

◦교통규제심의 결과에 따라 현장여건 사항 등 고려하여 원할한 공사추진을 위해 반영하는 것으로 타당하며 공사비 산정 등 적정함.

변경내용

조경복구계획

변경

[수종변경]

◦변경 내역

(교목) 변경없음(소나무 등 13종)

(관목) 조팝나무, 수수꽃다리 등 11종 → 조팝나무, 화살나무 등 11종

◦변경사유: 지하차도 상부 녹지대 영산홍 추가, 보도부 띠녹지 수수꽃다리 삭제

[물량 및 공종변경]

◦변경 내역

구 분	규격	단위	당 초	변 경	증·감(△)	비 고
교 목 류	-	주	308	315	7
관 목 류	-	주	22,250	24,477	2,227
지피(초화)류	-	본	74,537	70,716	△3,821	교통섬 제외 반영 등
수목폐기	-	주	-	4	4
식물매트	340*500*T40	㎡	978	1,186	208
잔 디	-	㎡	-	717	717
롤 잔 디		㎡	-	528	528
멀 칭 재	-	㎡	121	-	△121	교통섬 제외분
수목보호틀	-	m	76	-	△76

◦변경 사유: 조경복구계획 변경 물량 반영

사업비

변경

*********************************************

[단위: 천원]

구 분	당 초	변 경	증·감(△)	비고
*****	*******	*******	******
*****	*******	*******	******
*****	******	******	*****
*****	*******	*******	******

- 기존비목 : 계약단가 적용

- 신규비목 : 협의율(89.077%) 적용

- 감리의견 : 적정함.

사업비

***************************************

행정절차

해당 없음(설계변경 심의 미이행 대상)

공기영향

영향 없음

처리의견

◦관계 교통 심의 기관(경찰청) 및 관리청(서부공원여가센터) 의견 반영하여 조경 복구 계획 변경 수립하고 현장여건에 따른 물량 반영하는 것으로 변경에 따른 사유, 내용, 규모가 적정한 것으로 판단됨.

비 고

따로 붙임 : 실정보고서(제2자유입건 제2023-127호(2023.4.18))

결재

주무관

이은국

조경시설과장

김근주

방재시설부장

04/24

이동훈