【별지 제7호서식】

설계변경심사요청서

[2022년 사당1동외14개동 상수도공사(제3회-최종)]

부분공개(6)

시 행	시설관리과-7305
시행일자	2023. 4. 24.
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장 (안전조사과장)
접수번호
접수일자

주무관		시설운영팀장	시설관리과장			결재
전소영		김선호	04/24
			조임남
협 조

공 사 명	2022년 사당1동외 14개동 상수도 공사(장기계속단가)		요청기관	남부수도사업소
공사위치	동작구(노량진1,2동, 본동, 대방동, 상도1~4동,신대방`1,2동, 사당1~4동, 동작동)
공사기간	2022. 4. 25.~2023. 6. 30.		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)		-
계약금액 (최초계약 금액)	****************************************************** ********************************************************
예산내역	세부 사업명	예산과목				예산액(천원)
	급수공사 (33201)	상수도사업비용, 영업비용, 급·배수공사비, 신설공사비(급수공사)				*******
공사개요	[당 초] D=13㎜ ~ 300㎜, L=1,693m / 변실 27개소 [변 경] D=13㎜ ~ 300㎜, L=1,443m / 변실 31개소
설 계 자	․상 호 : 남부수도사업소 ․ 대 표 자 : 김분숙 ․책임기술자 : 전소영 (전화번호 : 3146-4603)
발 주 자	․담 당 자 : 전소영 (전화번호 : 3146-4603)
◦ 설계변경 사유(구체적으로 서술) - 현장 시공여건 변화 및 소규모 상수도공사의 특수성으로 물량변동(증·감) 발생 ․ 계약물량 증·감: 아스팔트 포장절단(200㎜이하, 지세) 등 791개 공종
◦ 첨부서류 1. 설계변경 보고서 및 내역서 1부. 2. 계약금액검증확인서 1부.