문서번호	공원여가정책과-5556
결재일자	2023. 4. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원녹지기획팀장	공원여가정책과장
이광희		박철수	04/24
			김인숙
협조

서울초록길 구축 기본계획 수립 용역 기성준공 보고

2023. 4.

푸른도시여가국

(공원여가정책과)

서울초록길 구축 기본계획 수립용역 기성준공 보고

서울 전역의 초록공간을 유기적 선형으로 연결하기 위한 「서울초록길 구축 기본계획 」용역이 부분완료됨에 따라 다음과 같이 기성준공처리코자 함

Ⅰ		사업개요

○ 용 역 명 : 서울초록길 구축 기본계획 수립 용역

○ 용역기간 : 2022. 6. 23. ~ 2023. 8. 22.

○ 용역내용 : 기본계획 수립

- 기초조사 : 가용지조사분석, 자연생태 인문환경 문헌조사 분석, 유사사례 분석 등

- 기본구상 : 개념 및 방향 설정, 공간전략 및 체계 설정, 유형화 세부전략 수립 등

- 타당성분석 : 타당성분석, 조성대상지 운영관리 기본구상

- 초록길 구축 기본계획 : 토지이용계획, 교통동선계획, 시설물배치계획, 식재계획 등

- 주요공간별계획 : 도입시설 검토, 연결성 검토, 경관 및 조망계획안 작성 등

- 기타사항 : 예산 및 재원조달계획, 주민·기관·전문가 기술협의, 성과품 작성 등

○ 용역금액 : 금485,760,000원

○ 계약업체 : (주)에이치엘디자인 대표 이호영

Ⅱ		주요 추진경위

○ ’22.  6. 23.    : 계약 체결 및 기본계획 용역 착수

○ ’22.  9. 20.    : 중간보고(1차)

○ ’22. 11. 29.    : 중간보고(2차)

○ ’22. 12.  5.    : 용역 변경 계약(기간연장 8개월)

○ ’23.  2.  2.    : 중간보고(3차)

○ ’23.  3. 14.    : 중간보고(4차)

○ ’23.  3. 29.    : 시범사업 대상지(도심권) 현장답사

Ⅲ		기성 준공사항

○ 기성 성과품 내용

연번	구 분	규격	수량	비고
1	초록길 1차 중간보고 자료(2022. 9. 20.)	A4	1부
2	초록길 2차 중간보고 자료(2022. 11. 29.)	A4	1부
3	초록길 3차 중간보고 자료(2023. 2. 2.)	A4	1부
4	초록길 4차 중간보고 자료(2023. 3. 14.)	A4	1부

○ 기성 준공금액

구 분		계약금액	기성금액				비고
			선급금액	금회금액	누계금액	잔여금액
총용역비		485,760,000	236,500,000	200,684,000	437,184,000	48,576,000
도급비	공급가액	441,600,000	215,000,000	182,440,000	397,440,000	44,160,000
	부가가치세	44,160,000	21,500,000	18,244,000	39,744,000	4,416,000

○ 검토의견

- 중간보고 자료 제출 및 공정 진행 사항 검토 결과 계약조건에 따라 부분완수하였기에 기성준공처리하고 계약부서에 통보하고자 함

- 향후 관련부서 협의 및 준공보고 등 사업추진에 만전을 기하고자 함

Ⅳ		향후계획

○ '23. 5 ~ 6월 : 관련 부서 및 기관 협의

○ '23. 6월중    : 용역완료 보고

○ '23. 7 ~ 8월 : 의견반영 및 성과품 작성

○ '23. 8. 22.   : 용역준공

○ '23. ~ '26.  : 서울초록길 구축

붙임  1. 기성성과품 사진 1부.

2. 기성신청 제출서류 1부.  끝.