아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰-제2자유로 종점부 입체화 공사

1. 토목부-7559호(2023.4.25)와 관련된 문서입니다.

2. 우리부에서 추진중인 「제2자유로 종점부 입체화 공사」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 제2자유로 종점부 입체화 공사

나. 도 급 비 : 금49,970,800,000원(금사백구십구억칠천팔십만원)

다. 공사기간 : 2019. 8. 1.~2023.4.31(장기계속 3차 – 2021.12. 1 ~ 2023.4.30.)

가) 준공기한 연기 내역

① 총차 2019. 8. 1.~2023. 4.30→2019.  8. 1.~ 2023. 5.31(증 31일)

② 3 차 2021.12. 1.~2023. 4.30→2021.12. 1.~ 2023. 5.31(증 31일)

나) 귀    책 : 도시기반시설본부

다) 지체상금 : 미부과

라) 연기사유 : 붙임 의뢰서 참조

라. 도 급 사 : 삼부토건㈜외 2개사

마. 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충(교통사업특별회계), 제2자유로 종점부(난지도길)입체화(교통개선분담금 계정), 시설비

붙임 1. 준공기한 변경 검토보고 1부.

2. 합의각서 각 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	토 목 부 장
주무관	박희정		토목총괄과장	최진우		토목부장	04/25
이임섭
협조자	주무관	조재근
시행	토목부-7604	(	2023. 4. 25.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2112	/전송	02-6438-2199	/	parkoran@seoul.go.kr	/	부분공개(5)