문서번호	기전과-5284
결재일자	2023. 4. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		04/25
		代박신범
협조

원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「헌릉로 중앙버스전용차로 설치 전기공사(신호)」

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「헌릉로 중앙버스전용차로 설치 전기공사(신호)」

2023. 4. 25.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

헌릉로 중앙버스전용차로 설치 전기공사(신호) 관련 원인자부담공사 변경승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 변경승인 통보 1차

ㅇ *******************************

□ 원인자부담공사 변경승인 요청 2차

ㅇ 도시기반시설본부 설비부-6023호(2023.04.21.)

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 헌릉로 중앙버스전용차로 설치 전기공사(신호)

□ 공사위치 : 서초구 청계산입구 삼거리 ~ 내곡IC 삼거리

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******** ***	********	***********	*******

Ⅲ		검토 내용

□ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	*****************	*****************

□ 변경사유 : 토목공사 지연으로 인한 준공기한 연기

Ⅳ		검토 의견

□ 현장 확인 및 변경승인 서류를 검토한 바 적정하여 승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 변경승인 요청 제출 서류 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 설계도면 1부.

5. 감리사 서류(기술검토의견서) 1부.  끝.